구민이 주인되는 희망강북!
		강북구
수신자	내부결재
(경유)
제 목	오동근린공원 재활용선별장 상부 테니스장 조성사업 설계변경 시행

우리구에서 시행하고 있는『오동근린공원 재활용선별장 상부 테니스장 조성사업』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 오동근린공원 재활용선별장 상부 테니스장 조성사업

2. 위    치 : 번동 115-10 오동근린공원 재활용선별장

3. 공사기간 : 2018. 8.13. ~ 12.20.

4. 도 급 액 : 금465,577,000원(금사억육천오백오십칠만칠천원)

5. 도 급 자 : 건축 - ㈜송일건설, 조경 – 성보종합환경(주)

6. 설계변경사유 및 내역 : 별첨 보고서

7. 공사비 변경내역

구 분		금 액 (원)		증 감
		변 경 전	변 경 후
총공사비		516,095,000	627,671,130	증111,576,130
도급비	공급가액	423,251,819	523,551,819	증100,300,000
	부가가치세	42,325,181	52,355,181	증10,030,000
	소 계	465,577,000	575,907,000	증110,330,000
관급자재		50,518,000	51,764,130	증1,246,130

8. 예산과목

- 공원녹지과, 도시공원 이용공간 개선, 도시공원관리, 오동근린공원 재활용선별장 상부 테니스장 조성, 시설비(사고이월, 금39,290,180원원)

- 공원녹지정책과, 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원이용 서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비, 시설비(시비, 금71,039,820원)

붙 임  1. 변경내역서 1부.

2. 제비율 검증 1부.

3. 계약심사 결과 1부.

4. 실정보고서 1부. 끝.

★주무관	김응주		공원팀장	이병호		공원녹지과장	신현호		도시관리국장	12/19 한병준
협조자	계약팀장	남정우		재무과장	김영모
시행	공원녹지과-20273	(		)	접수		(		)
우	01071	서울특별시 강북구 도봉로89길 13(수유동)	/	http://www.gangbuk.go.kr
전화	901-6923	/전송	901-6930	/	jollman1@gangbuk.go.kr	/	대시민공개