문서번호	설비부-17887
결재일자	2018.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
호정오		김은덕	전결 12/20 代유병기
협조

『양평1유수지 CSOs 저류조설치 전기공사(1차)』

저류조 배관 실정보고 내용 검토 보고

2018. 12.

도시기반시설본부

[설  비  부]

『양평1유수지 CSOs 저류조설치 전기공사(1차)』

저류조 배관 실정보고 내용 검토 보고

「양평1유수지 CSOs 저류조설치 전기공사(1차)」와 관련하여 책임건설사업관리기술자가 제출한 저류조 배관 변경에 따른 실정보고 내용을 검토하고 결과를 보고함.

공사개요

□ 공 사 명 : 양평1유수지 CSOs 저류조설치 전기공사(1차)

□ 공사위치 : 영등포구 국회대로22길 20(양평1유수지 내)

□ 공사규모 : CSOs 저류조설치(Q=46,000㎥)

□ 공사내용 : 수배전설비, 건축전기설비, 계측제어설비, 소방설비 등

□ 계약금액 : 100,000,000원(총차 654,268,420원)

□ 공사기간 : 2018.05.15. ~ 2018.12.31.(총차 2019.09.30.)

□ 계약업체 : 제이엠스테이지(주)-전기, ㈜진실로건설-소방

□ 감리업체 : ㈜경동엔지니어링 외 3개사

관련근거

□ ㈜경동엔지니어링 양평1유건 제2018-316호(2018.12.19.)

- 실정보고(저류조 전등 및 계측 배관 변경)

검토내용

□ 변경사유

- 저류조 전등 및 계측 배관을 유지관리 편리성 및 품질 향상을 위하여 HI-PVC 매입 배관에서 스테인레스(SUS) 노출 배관으로 변경

□ 수량 및 금액 : 변동없음

감리단 의견

□ 유지관리의 편리성 및 품질 향상을 위하여 HI-PVC 매입 배관에서 스테인레스(SUS) 노출 배관 변경으로 적정한 것으로 판단

검토결과 조치계획

□ 감리단 검토의견이 적정한것으로 판단되어 실정보고 내용을 승인하여 우선 시행토록 지시하고 추후 설계변경에 반영

붙임  실정보고(저류조 전등 및 계측 배관 변경) 1부. 끝.