투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약자 변경 요청_하남선(5호선연장) 신호보안설비공사

1. 서지 하남선(감) 제18-516호(‘18.12.20.) 및 도시철도설비부-12017호(‘18.12.21.)관련입니다.

2. 「하남선(5호선연장) 신호보안설비공사」 계약자 변경을 아래와 같이 요청합니다.

가. 계 약 명: 하남선(5호선연장) 신호보안설비공사

나. 계 약 일: 2018. 7. 10.  * 착공일 2018. 7. 13.

다. 변경계약일: 2018. 12. 10.  * 준공기한 연장

라. 준공일자: (1차)2019. 6. 30. / (총차)2021. 5. 11.

마. 계약금액: (1차)2,166,534,000원 / (총차)5,259,573,100원

바. 계약자 변경 현황

구분	당초	변경	비 고
주계약업체	주식회사 보성엔지니어링 (대표자: 박광신)	주식회사 신성씨앤아이 (대표자: 신현갑)
(공동)도급업체	주식회사 삼대에너지 (대표자: 이영경)	변경없음

사. 변경사유: 분할합병에 따른 계약자 변경

붙임  1. 방침서(계약자 변경보고) 1부.

2. 관련공문 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	이재복		신호과장	代이재복		도시철도설비부장	12/21 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-12025	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 8층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7272	/전송	772-7308	/		/	부분공개(5)