문서번호	설비부-18050
결재일자	2018.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이호기		여인웅	12/26 代여인웅
협조

『서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』

수중사류펌프 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  12.

도시기반시설본부

설비부

『서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』

수중사류펌프 납품기한 연기 검토 보고

「서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사」와 관련 관급자재의 납품기한 연장 실정보고 사항에 대한 검토 보고임

사업개요

- 규    모 : 총인처리시설 737,000㎥/일

- 공사기간 : ‘2017.06.16 ~ ’2020.02.15.(2차 18.06.19~19.06.30)

- 공 사 비 : 4,798백만원(2차 1,510백만원)

- 시 공 사 : 대윤환경(주) 대표 김우진

- 감 리 사 : ㈜동해종합기술공사 외 3개사

관련근거

- 서남총인(감) 제2018-708(‘18.11.08) 수중사류펌프 납품기한 연장요청 검토 보고

- 서남총인(기) 제18-65(18.11.08) 관급자재(수중사류펌프) 납품기한 연기 요청

검토내용

□ 관급자재 계약현황                                     (단위 : 원)

구 분	계약번호	계약금액	계약일자	준공(납품)기한	계약자	비고
수중 사류펌프	00177016212	2,159,812,200	‘18.05.21	‘18.12.31	㈜대한중전기

□ 납품기한 연기

- 납품기한 2019.10.31.까지

□ 연기 사유

- 토목공사의 유입펌프장 구조물 완료시기에 맞춰 납품기한 연기

□  납품기한 연기 내용

구 분	계약번호	계약금액	납품기한		계약자	비고
			당초	변경
수중 사류펌프	00177016212	2,159,812,200	‘18.12.31	‘19.10.31	㈜대한중전기

- 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□  감리단 검토의견

-  납품기한 연장 요청한 관급자재(수중사류펌프)가 공정상 반입되지

않았고 납품기한이 도래되어 구조물 완료시기에 맞춰 설치할 수

있도록 2019.10.31까지 연기하는 것이 타당하다고 사료됨.

보고자 의견

- 감리단에서 제출된 내용을 종합적으로 검토한바

· 선행공정인 토목 구조물공사 완료시기에 맞춰 수중사류펌프의 납품기한 연장이 필요하므로 납품기한 연장 요청코처 합니다.

붙 임 : 관급자재(수중사류펌프) 납품기한 연장요청 검토 보고 1부. 끝.