문서번호	기술심사담당관-9265
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제187호

				시 민
주무관	심사총괄팀장	기술심사담당관		행정2부시장
조창길	이학구	최진선		06/02 김병하
협 조
	도시안전실장		조성일

외부전문가 기동점검단 점검결과 보고(12주차)

2014.  6.

서 울 특 별 시

기술심사담당관

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

외부전문가 기동점검단 점검결과 보고(12주차)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 외부전문가 기동점검단의 12주차(2014.5.26.~5.31.) 활동결과에 대하여 보고 드림.

점검개요

2014. 5. 27(화)	2014. 5. 29(목)	2014. 5. 31(토)
시립노원시각장애인복지관 재건축공사	우이~신설 경전철 2공구 건설공사	신사사거리~고양시계간 도로개설공사
도시기반시설본부(건축부)	도시기반시설본부(도시철도사업부)	도시기반시설본부(토목부)
’13.01.02 ~ ‘14.08.31(75.8%)	’09.09.15 ~ ‘14.09.14(64%)	’12.12.27 ~ ‘15.12.26(4.06%)
· 다원구조기술사사무소 강정임 · 한국건설안전기술협회 안무영 · 이아건설 최광현 (내부직원 : 건축심사팀 등 3)	· 한국건설기술연구원 이대영 · 삼림엔지니어링 이상범 · ㈜건영이엔씨 정상민 (내부직원 : 기술관리팀 등 3)	· 한맥기술 박윤규 · 우설엔지니어링 최영구 · 웅진개발 이홍준 (내부직원 : 토목심사팀 등 3)

중점 점검사항

❍ 건축물 신축현장의  콘크리트 품질, 건축마감 시공상태 전반

- 마감공사에 따른 창호, 골조, 방수실태 등 품질 및 시공상태 확인

- 기타 안전시설 설치 및 안전관리 실태 등

❍ 지하철건설공사 구간내 철근 배근 및 가시설 시공 실태

- 지하정거장 철근배근 간격 확인 및 스터럽 철근 결속상태 확인

- 토공 구간 가시설 설치 및 누수 상태 점검

❍ 도로개설 현장 터널 구조물 시공 및 품질관리․안전관리

- 터널내 숏크리트 시공 적정여부 및 안전관리실태

- 터널 시‧종점부 및 주변 배수시설 등 수방대비실태 등

점 검 결 과

□ 시정이 필요한 사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	수 방	환경·시민 불편·기타
계	24	5	16	3	0
시립노원시각장애인 복지관 재건축공사	13	-	12	1	-
우이~신설 경전철 2공구 건설공사	6	5	1	-	-
신사사거리~고양시계간 도로개설공사	5	-	3	2	-

□ 분야별 주요내용

안전관리 분야

- 구조물 시스템동바리 수평보강재 설치높이 부적정(40㎝→90㎝ 시공)

- 정거장 개착 구간 내 점검통로 안전난간 설치 지연

품질관리 분야

- 건축물 쉬트방수재 일부 파손으로 방수기능 상실

- 건축물 지상1층 방풍실 출입문 상부프레임 구조검토 후 보완 필요

- 터널내 공동구 기초여굴 발생부 침하대비 다짐관리 필요

수방‧환경 등

- 터널 종점부 구간 사면 계곡부 우수처리 시설 미설치

- 상·하행 터널 종점부 상부 사면측 배수로 설치 지연

□  지적사항 조치

지적사항은 점검당일 시공업체 및 감리단에 전달하여 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 관리 및 현장 지도토록 공문으로 통보

현장별 주요 지적사례

· 위    치 : 서울시 노원구 상계동 771번지

· 사업개요 : 지하1층, 지상4층 / 연면적 2,752.84㎡

· 공사금액 : 8,328백만원

· 공사기간 : 2013.01.02. ~ 2014.08.31.(75.8%)

· 시공/감리 : 천마산건설(주)/ ㈜전인CM

· 추진공종 : 마감공사

1. 시립 노원시각장애인 복지관 재건축공사

○ 옥상 파라펫 벽체 외장재 포함 구조검토 필요
⇒ 파라펫에 외장재 지지를 위해 추가 설치된 기둥 등 현 시공된 상태 구조 재검토 조치

○ 지상1층 방풍실 출입문 상부 프레임 구조검토 후 보완
⇒ 출입문 상부 프레임을 건축물에 지지시키는 연결 접합개소 추가 설치

○ 각층 화장실 상부 천정 마감재 안측 벽체 미장 누락
⇒ 화장실 상부 등 천정 마감재 시공으로 보이지 않는 벽체 미장 누락부는 일제조사후 보완시공 조치

○ 옥상 파라펫 두겁석 접합 이음매 부분 물흐름으로 인한 석재벽체 누수
⇒ 옥상 파라펫 두겁석에 대한 시공 적정여부 확인과 접합부 이음매 물흐름 차단 보완조치

○ 지하층에서부터 연결된 1층 바닥 슬래브 방수재 파손
⇒ 쉬트 방수재는 일부 파손으로도 전체 구조물 방수기능 상실 등의 큰 문제점이 제기되므로 전수조사 및 보수대책 강구

· 위    치  : 수유동 419입구 사거리~삼양사거리

· 사업개요  : 총 연장 3,233m, 정거장 4개소

· 공사금액 : 115,746백만원

· 공사기간 : 2009.09.15 ~ 2014.09.14.(64%)

· 시공/감리 : 두산건설외3 / ㈜유신외3

· 추진공종 : 정거장 및 터널 토공, 구조물공 등

2. 우이신설 경전철 2공구 건설공사

○ 개착구간 내 점검통로 안전난간 설치 지연

⇒ 5번 정거장 1단 점검통로 가시설 진행공정에 맞추어 안전난간 설치 조속 마무리 필요

○ 정거장 개착 배면 가설 토류판 간극발생으로 토사유출 우려

⇒ 4번 정거장 STA.2k+660 토류판 간극발생구간 보수 및 토사유출 방지대책 수립

○ 정거장 구조물 시스템 동바리 수평보강재 설치높이 부적정

⇒  4번 정거장 일부 시스템 동바리 수평보강재 설치규정 미준수 구간에 대하여 바닥면에서 40cm이내에 수평보강재 추가 설치

· 위    치  : 은평구 가좌로 377일원

· 사업개요  : 본선 867m(터널 485m)

· 공사금액  : 240억원

· 공사기간  : 2012.12.27. ~ 2015.12.26.(40.6%)

· 시공/감리 : 현대건설(주)/신명건설기술공사 외 1

· 추진공종  : 종점 사면부 토공, 산마루측구 등

3. 신사사거리~고양시계간 도로개설공사

○ 터널종점 구간 계곡부 우수처리시설 미설치

⇒ 강우시 현장내로 유입되는 우수처리를 위해 가배수로 계획(계곡부 유입수) 등 전반적인 배수시설 보완

○ 터널내 공동구 기초여굴 발생부 침하대비 다짐관리 필요

⇒ 공동구 기초 여굴 발생부는 충분한 지지력이 확보될 수 있도록 철저한 다짐실시

○ 터널내 숏크리트 구간 누수발생

⇒ 누수부에 유도 배수시설 등을 설치하여 보완

○ 산마루측구 유수 낙하부 세굴발생 우려

⇒ 유수낙하부에 세굴방지대책을 수립하여 보완조치

○ 상․하행 터널 종점부 상부(사면)측 배수로 설치 지연

⇒ 강우시를 대비 사면구간에 계곡수 유도처리 배수로를 조속히 설치하는 방안 강구