투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시지방경찰청장(교통관리과장)
(경유)
제목	공사중 교통소통대책 기간변경 승인요청(남산예장자락 재생사업)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 : 교통관리과-16199호(2018.7.2.), 교통운영과-21946호(2018.12.26.)

3.우리본부에서 시행중인 「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」과 관련하여 공사중 교통소통대책에 대하여 보완설계 시행에 따른 절대공기 부족에 따라 아래와 같이 공사중 교통소통대책 기간변경 승인요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

위 치	기간변경 승인요청		사 유
	당 초	변 경
중구 예장동 4-1일월 (소파로, 퇴계로2가 교차로 등)	2018.06.26. ~2018.12.31	2018.06.26. ~2019.07.31	보완설계 시행에 따른 공정계획 변경에 따른 절대공기 부족

붙임 1) 공사중 교통소통대책 기간변경 요청 자료 1부.

2) 도로점용공사장 교통소통대책 변경승인 회신 문서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김소연		방재시설과장	진재섭		방재시설부장	12/27 이임섭
협조자
시행	방재시설부-16595	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 (무교동, 프리미어플레이스 빌딩 14층)	/
전화	02)3708-8763	/전송	02)3708-8756	/	ruracom@seoul.go.kr	/	대시민공개