투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울시 중구 퇴계로 36가길 104 (주)공간종합건축사사무소 대표 박 윤 석 귀하
(경유)
제목	공정관리 및 계약사항 이행 철저 요청 (서울애니메이션 재건축공사 설계용역)

1. 건축부-21203호(2017.12.08)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 설계용역 중인「서울애니메이션 재건축공사 설계용역」공정계획에 의하여 12월계획설계를 완료 추진되어야 하나 서울산업진흥원의 요구사항 등에 대한 협의 지연으로 전체공사 일정에 막대한 차질이 예상됩니다.

3. 따라서, 설계용역기간 지연에 따른 용역기간 만회대책을 수립하시어 2017.12.22(금)까지 우리본부(건축부)로 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 또한, 계약상대자가 정당한 이유없이 계약담당자의 이행 촉구에 따르지 아니한 경우 등 용역수행 기한내 용역을 완성하지 아니할 경우 지연배상금 부과 등 관계규정에 의거 불이익 처분됨을 알려드리니 이점 각별히 유념하시어 계약이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		건축총괄과장	박범규		건축부장	12/15 代박범규
협조자
시행	건축부-21752	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2608	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)