문서번호	설비부-3947
결재일자	2018.3.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	03/26 권오식
협 조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 통신공사(1차) -

설계변경(1차1회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.03.

도시기반시설본부

설비부

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 통신공사(1차) -

설계변경(1차1회) 검토 보고

본 통신공사(1차) 진행 중 당초 반영된 보험료, 산업안전보건관리비 미사용 금액 정산 사항 발생 등에 대한 책임건설사업관리기술자의 설계변경(정산) 실정 보고가 있기에 다음과 같이 조치하고자 보고 드림.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명  : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 통신공사

□ 공사위치  : 서울특별시 송파구 풍납동 일대

□ 공사규모

- 램프신설 L=1,383m, 램프이설 L=1,309m

- VDS(차량검지기)이설×6개소, CCTV(동영상수집기)이설×2개소

- VMS(도로전광판)이설×2개소, LCS(차량통제시스템)이설×4개소

- 기타(광통신케이블, 영상검지기 등)이설×1식

□ 공사기간 : 총차 `17.4.27. ~ `20.3.25.(1차 `17.4.27.~`18.5.30.)

□ 계약금액 : 총차 금1,029,932,841원(1차 금367,000,000원)

□ 계 약 자 : ㈜한포넷 대표 이현우

□ 감 리 자 : ㈜이산

2		설계변경 내용

□ 변경발생 근거

□ 변경설계서제출(1차공사 1회) : 이산 2018-1298호(`18.3.26.)

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 : 행정자치부 예규 제88호(`17.4.11.)

- 제1장 제8절 보험료 사후 정산 등(국민건강, 노인장기요양, 국민연금보험료 사후정산)

□ 변경발생 사유

□ 통신공사(1차) 계약금액에 반영된 보험료, 산업안전보건관리비 미사용 금액 정산사항이 발생함.

- 통신공사(1차) 정산 내용

**	**********			***
	*****	*****	***
***	**********	**********	*
*****	***********	***********	*
*****	**********	**********	*
****	**********	**********	*
*****	*********	*********	*
*****	*********	*********	*
*******	*********	*	***********	********
*********	*******	*	*********	********
*******	*********	*	***********	********
*******	*********	*	***********	********
*********	*********	*********	***********	********
****	**********	**********	*
*****	**********	**********	*********
**	**********	**********	***********
**********	*********	*********	*
****	***********	***********	************
*****	**********	**********	***********
*****	***********	***********	*************	*******

3		보고자 조치의견

□ 본 통신공사(1차)를 준공 처리하고자 발생한 보험료, 산업안전보건관리비 미사용 금액 정산사항 발생에 대한 책임건설사업기술자의 실정 검토 보고가 적합하기에 아래와 같이 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 설계변경(총차/1차) 예정금액

**	******	******	******	***
***	*************	*************	*	****
***	***********	***********	**********	*******

5		향후 계획

□ 2018.05. : 공사준공

따로붙임 : 1. 책임 건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(통신공사-1차1회) 1부. 끝.