문서번호	도시안전과-17501
결재일자	2018.12.31.
공개여부	대시민공개

주무관	관제센터지원담당	도시안전과장		안전건설교통국장
김헌성	백혜정	현병구		12/31 하순호
협 조 자
	예산담당		유미조
	계약담당		이계웅

- 97개소 방범용 CCTV 구매설치 - 계약기간 연장 및 사고이월 조치계획
		0

2018. 12.

안전건설교통국

도시안전과

- 97개소 방범용 CCTV 구매설치 -

계약기간 연장 및 사고이월 조치계획

관내 방범(재난) 취약지역에 대한 방범용 CCTV 설치사업 보험료 정산기간 부족으로 당해연도 준공이 불가능하여 예산이월 조치코자 함.

Ⅰ		개 요

❏ 사 업 명 : 97개소 방범용 CCTV 구매설치

❏ 사업기간 : 2018. 8. 16 ~ 2018. 12. 14

❏ 소요예산 : 1,086,096,500원

❍ 계약금액 : 975,000,000원 / 조달수수료 : 7,334,000원

❏ 계약방법 : 조달계약(총액, 중증장애인생산품 생산시설)

❏ 계약상대 : (재)한국장애인개발원

❏ 사업내용 : 방법용 CCTV 97개소 설치

❍ 현장설비 : 회전카메라 97대, 고정카메라 204대, 비상벨 97개 등

Ⅱ		예산현황 및 문제점

❏ 재     원 : 특별교부세

❍ 배정일시 : 2017.12.11.(기획예산과-15874호), 2018.3.26.(기획예산과-2880)

❍ 간주처리 : 2017.12.18.(기획예산과-16105호), 2018.3.30.(기획예산과-3160)

❏ 예산현황

(단위 : 천원)

총사업비	교부예산	기집행	미집행	사고이월액	비 고
1,400,000	1,400,000	1,299,278	0	100,722	-

❏ 문제점 및 조치 – 조달청 설계변경 기간(보험료 정산) 필요

❍ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따라 보험료 사후정산이 필요하나 조달청 설계변경에 3주이상 소요됨에 따라 기간연장

❍ 2018. 12. 14일 CCTV 설치완료됨에 따라 보험료 사후정산에 필요한 100,722천원을 제외한 881,612백만원 조달청 기성부분 지급

Ⅲ		협조사항

❏ 조달청 계약기간 연장신청 및 재원변경 : 재무과

❍ 계약기간연장

- 2018. 8. 16 ~ 12. 14 → 2018. 8. 16 ~ 2019. 1. 31

❏ 2018 회계연도 세출예산 사고이월 요구서 제출 : 기획예산과

붙임 : 1. 사고이월 요구서 1부.

2. 사고이월명세서 1부.

3. 계약서 1부.

4. 원인행위부 1부.

5. 지출부 1부.  끝.