문서번호	기술심사담당관-106
결재일자	2019.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제2호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
윤갑진	류용열	김홍길		01/03 진희선
협 조
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환
	기술관리팀장		이상석

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(12월)

2019. 1.

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(12월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는「외부전문가 기동점검단」의 ’18년 12월 중 활동결과에 대하여 보고 드림.

□ 점검개요

점검일자	’18.12.04.(화)	’18.12.11.(화)	’18.12.12.(수)	’18.12.18.(화)
공 사 명	위례택지개발지구 A1-3단지 공동주택 건설공사	신림〜봉천 터널 도로건설공사(2공구)	정릉 공공주택 조성사업	하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사
사업부서	서울주택도시공사	도시기반시설본부 (토목부)	서울주택도시공사	도시기반시설본부 (도시철도토목부)
공사기간 (공정률)	’18. 2. ~ ’20. 8. (15.7%)	’10.10. ~ ’20.12. (43.5%)	’17.12. ~ ’19. 7. (40%)	’15. 3. ~ ’19. 4. ( 88%)
점검자	· ㈜에이치엔파트너 허갑수 · ㈜한국안전이엔지 권회구 · 포스코 A&C 최범종 (내부 : 건축심사팀 3)	· ㈜대한이앤씨 박주경 · 바우컨설탄트 윤상길 (내부 : 기술관리팀 2)	· 유탑엔지니어링 이세웅 · ㈜미공간 유병학 · 동양미래대학교 장덕배 (내부 : 건축심사팀 2)	· ㈜유케이이엔씨 유병률 · 한국구조물안전연구원 이채규 · ㈜진우엔지니어링 안삼현 (내부 : 토목심사팀 2)

□ 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- One-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비, 인력 투입현황 관리 여부

- 현장반입 건설기계임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부 여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 토공 및 가시설 설치상태 등 안전관리 실태

- 동바리, 비계 설치 및 유지관리 실태 점검

- 터널, 개착구간 등의 가시설 시공 및 유지관리 실태 점검

- 취약공종(가설구조물, 양중시설, 흙막이) 시행시 안전점검표(체크리스트) 작성 여부

❍ 구조물에 대한 품질․공정관리 등 시공관리

- 시공 상세도 등 설계도면 작성상태 및 시공계획 수립 여부

- 구조물 시공 및 품질관리 상태 점검

□ 점검결과

❍ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	43	15	21	7
위례택지개발지구 A1-3단지 공동주택 건설공사	14	8	3	3
신림〜봉천 터널 도로건설공사(2공구)	4	2	2	0
정릉 공공주택 조성사업	15	2	9	4
하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사	10	3	7	0

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

❍ 지하주차장 보 부위 거푸집 지지대(동바리)의 수직도 미흡하고, 상부 편심 및 고정상태 불량 [위례택지개발지구 A1-3단지 공동주택 건설공사]

⇒ 거푸집 지지대(동바리)는 90°가 되도록 수정 설치토록 하며 수평 연결대 보강 및 동바리 상부 1개소 이상 못으로 고정 필요

❍ 어스앵커 해체 전 안전성 검토 필요 [위례택지개발지구 A1-3단지 공동주택
건설공사]

⇒ 어스앵커 해체 전에 지간 거리가 좌굴에 충분히 버틸 수 있는지 흙막이 벽체에 대한 안전성 검토 후 해체 요망

❍ 신림선 경전철 중첩구간 중 경전철 굴착구간 천단부 shotcrete면에
호상균열이 다수 확인되므로 조치 필요 [신림〜봉천 터널 도로건설공사(2공구)]

⇒ 공정상 shotcrete 타설 후 장기간 방치하게 되므로 현 상태에서 스캐닝
하고 방수 전까지 관리 검토 필요

❍ 2차 라이닝 줄눈 시공이 불균질함 [신림〜봉천 터널 도로건설공사(2공구)]

⇒ 타일마감 등을 고려하여 보완방안을 강구할 것

품질관리 분야

❍ 기초 및 상부 보양이 되어 있는 곳에 빗물이 고여 결빙으로 인한 하자발생 우려 [위례택지개발지구 A1-3단지 공동주택 건설공사]

⇒ 비가 그치면 빗물이 얼기 전 고인 빗물을 제거하고 보양물 재설치 요망

❍ 보 철근 스트럽 및 정착 철근의 결속, 배근간격, 이음길이 도면과 상이하게 시공 [정릉 공공주택 조성사업]

⇒ 정착철근의 이음길이와 밴딩, 배근 간격 등을 도면과 시방서 규정대로 수정 시공한 후, 검측결과 기록 유지

❍ 외벽 시공 조인트에 설치한 지수판 부착 콘크리트 미 제거 및 지수판 1/2 묻힘 미 준수 [정릉 공공주택 조성사업]

⇒ 지수판에 부착된 콘크리트 제거 및 하부 콘크리트에 1/2 묻힘 준수

❍ 건물 외벽 쌍줄강관비계 가새와 비계 교차 부위마다 클램프 미 결속
[정릉 공공주택 조성사업] ⇒「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 가시설 보완

❍ 지중구조물 개착 콘크리트 박스 시점부에 외부로부터 콘크리트 상면으로 유수 유입 우려 [하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사]

⇒ 콘크리트 내구성 확보를 위해 물끊기 시설 설치를 검토할 것

❍ 터널구간 라이닝 신축이음 주변 박리 발생 및 균열유발줄눈 시공 누락
[하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사]

⇒ 신축이음 주변 박리 제거 후 표면 마무리 및 기초콘크리트 신축이음 위치에 균열유발줄눈 시공 요망

기  타

❍ 취약 공종(가설구조물, 양중시설, 흙막이) 시행시 안전점검표(체크리스트)
미 작성 [정릉 공공주택 조성사업]

⇒ 취약공종 안전관리 강화를 위한 안전점검표(체크리스트)를 시공자가 작성하고 건설사업관리기술자가 확인할 것

□ 조치사항

❍ 지적사항은 점검 당일 시공업체, 공사감독관에 전달하여 즉시 시정 요구

❍ 발주기관(부서)에 지적사항 시정 및 현장관리 철저토록 공문 통보

붙 임 : 기동점검 주요 지적사례(12월).  끝.