투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(지상 4층 천정 덕트 설치공간 실정보고 승인 통보)

1.업무지시현장 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사(건축)(장기1차) 용성종합건설 주식

회사, 시립중랑노인전문요양원 증축공사(건축)(장기1차) 주식회사 펨

코엔지니어링 건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2019-01-08 15:01:53

3.지 시 내 용 :

가. PC18(시립요양원)-220(2018. 12. 28.)호 관련입니다.

나. 귀 책임건설사업관리기술자가 우리 본부에 제출하신 「시립중랑노인전문요양원 증축공사」 천정 덕트공간 부족에 따른 대책검토 실정보고를 승인하오니, 품질. 안전. 시공관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

다. 아울러, 천정 높이가 변경되는 구간의 설계도서를 변경하고, 공사 전 시공상세도를 작성토록 하여 이질 느낌이 최소화 되도록 작업하시기 바랍니다.  끝.

★주무관							문성재			의료시설과장					이형재					건축부장					01/08 임인구
협조자
시행			건축부-291									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 13층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2616						/전송			02-3708-2659					/	msj2061@seoul.go.kr												/	대시민공개