문서번호	설비부-333
결재일자	2019.1.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
윤대영		임병국	01/09 임정규
협조

『서울시근로자복지관 증축 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기  검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 01.

도시기반시설본부

(설비부)

- 서울시근로자복지관 증축 기계설비공사

관급자재 납품기한 연기  검토보고

『서울시근로자복지관 증축 기계설비 공사』관련, 관급자재(엘리베이터) 납품기한 연기를 위한 검토 사항을 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 서울시근로자복지관 증축 기계설비공사

위    치 : 영등포구 국회대로 44길 10(영등포동 7가 57)

공사기간 : 2018. 09.29. ~ 2019. 05.31.

규   모 : 지하1층/지상5층 (연면적 3,776㎡)

지상5층 리모델링 및 1개층 수직증축(6층,454㎡)

○ 기계설비 : 냉난방, 위생, 환기설비, 소방설비 1식 등

공 사 비 : 342백만원(도급비 168백만원/관급비 174백만원)

시 공 사 : ㈜태성,㈜영은전력

위탁감독 : 서울시설관리공단

Ⅱ		관련근거

공사감독3처-113(`19.01.08) :『관급자재 납품기한 연기요청』에 관한

검토 보고서 제출

Ⅲ		검토 보고 내용

관급자재 납품기한 연기내용

품 명	계약번호	계약업체	계약금액(원)	납품 기한		비 고
				당 초	변 경
엘리베이터 구매 설치	00186083700	㈜한림승강기	60,580,000	2019.01.15.	2019.05.31.	계약금액 변경업음

연기 사유

- 선행 공종(건축) 준공 일정상 관급자재 납품 시기 미도래

지체상금 부과 여부 : 미부과

Ⅳ		보고자 의견

서울시설관리위탁감독관의 검토 보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 현장 여건에 맞게 적기에 납품될 수 있도록 납품 기한을 연기 조치하고자 함.

붙임 ：  관급자재 납품기한 연기 관련 문서  1부. 끝.