문서번호		교육지원과-377		주무관		도서관팀장		교육지원과장		행정관리국장
결재일자		2019.1.11.
				정연권		한용이		봉자광		01/11 정명수
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
					계약팀장		남정우
	2019년도 주민참여예산 선정사업 솔샘문화정보도서관 노후 승강기 교체 계획
2019.1.10.
강 북 구 (교육지원과)

- 2019년도 주민참여예산 선정사업 -

솔샘문화정보도서관 노후 승강기 교체 계획

2005년에 개관하여 일 평균 이용자수가 400명에 다르는 솔샘문화정보도서관의 노후 승강기를 교체하여 유지보수비용을 절감하고 이용주민의 안전한 도서관 이용 및 편의 증진에 기여하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 2019년도 강북구 주민참여예산 최종선정 사업

Ⅱ		사업개요

□ 사업내용: 솔샘문화정보도서관 노후 승강기 교체

□ 사업위치: 서울시 강북구 솔샘로 177, 솔샘문화정보도서관 승강기(지하1층~5층)

□ 기존 승강기 현황

구 분	규 격	수 량
형 식	PLC VVVF 인버터 방식	1대
용 량	15kw 장애인용 15인승 B1~4F
입 력	3⦰3W 380V 60HZ
제조사	(주)태화엘레베이터 2005.10. 설치
유지보수업체	명성종합엘리베이터

※ 2016년 승강기안전공단의 검사결과 조건부 합격

□ 사업의 필요성

○ 솔샘문화정보도서관에서 운행 중인 승강기(2005년 시공)의 극심한 노후화 및 사용량 증가로 인하여  안전사고의 위험 상존

○ 승강기 제어장치 인버터, 콘트롤 판넬, 엔코더, 센서의 노후화로 인한 오작동 발생

○ 권상기 노후화로 인한 베어링 소음 및 누유 발생

□ 현황 사진

솔샘문화정보도서관 전경(삼양동 소재)	노후 승강기
승강기 제어반 수리	권상기 누유 및 노후화

Ⅲ		추진계획 및 일정

□ 교체설치 대상

품 목	수량	단위	규격 및 사양
승객용(장애인) 겸용	1	set	15인승 1000KG 6-STOP

□ 교체방법: 기존 승강기 철거 및 신규 승강기 설치(건축 구조물과 연결된 시설 제외)

□ 추진일정

○ 2019. 1월: 세부 사업계획 수립

○ 2019. 1월: 승강기 철거 및 교체공사 발주

○ 2019. 2월: 승강기 교체공사 및 최종 안전검사 실시

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산: 금70,000천원(구비)

□ 산출근거

(단위: 천원)

교체품명	단 가	수 량	금 액	산출 내역
15인승 승강기	70,000	1	70,000	○ 승강기 교체 및 설치철거공사 : 70,000 - 조달청 나라장터 구매

□ 예산과목: 교육지원과, 공공도서관 확충 및 운영, 도서공간 조성, 솔샘문화정보도서관 승강기 교체(구 주민참여), 시설비및부대비, 시설비

Ⅴ		기대효과

□ 공공도서관의 노후된 승강기 교체로 안전사고 예방

□ 영유아‧장애인·노약자 등 도서관 이용자에게 안전하고 편리한 시설환경 제공

Ⅵ		행정사항

□ 강북구도시관리공단

○ 승강기 교체공사 관련 안전사고 예방 대책 추진

○ 도서관 이용자 불편 최소화를 위한 공지 및 이용 안내 게시

○ 승강기 교체공사 감독관 지정, 운영