문서번호	박물관과-710
결재일자	2019.1.21.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		평창동미술문화공간조성추진반장	박물관과장
유예동		윤대진	01/21 최원규
협 조
	주무관			조은성

평창동 미술문화복합공간 아트아카이브 2차수집 사업

월간업무보고 (12월)

2019. 1.

문 화 본 부

(박물관과)

평창동 미술문화복합공간 아트아카이브 2차수집 사업

월간업무보고 (12월)

평창동 미술문화복합공간 아트아카이브 2차수집 사업을 추진하고 월간(12월) 추진경과를 보고드림

□ 수행기간 : 2018. 12. 1. ~ 12. 31.

□ 추진현황

○ ’18.12월 계획 : 58%, 실적 : 60.3% (누적)

구 분	사업기간	’18. 12월 진척율		비고
		계획	실적
사업관리 (전체 진척율)	2018.8.29.~2019.2.28.	58%	60.3%
아트아카이브 리드개발 및 2차수집 계획 수립	2018.8.29.~2018.10.31.	100%	90.0%	리드개발 2차 보안 중
예술자료 2차수집	2018.10.22.~2019.1.31.	79%	78.6%
기관자료 전수조사	2018.8.29.~2019.2.28.	85%	82.0%
자료활용 기반조성	2018.11.1.~2019.2.28.	2.5%	10.2%

□ 주요 추진실적(12월)

사업관리

○ 과업별 진행상황 및 진척률(WBS) 현행화

○ 기 과업수행서에 따른 투입인력 및 계약 변경에 따른 투입인력 승인 (12.18.)

○ 중간보고회 개최(12.18.)

아트아카이브 리드*개발 및 2차수집 계획 수립

* 리드 : 잠재적 수집물의 소장자, 내용, 위치 등에 관한 정보

○ 중간보고회 자문수렴 등을 통한 리드개발(안) 보완

- 기초조사 단계에 리드 추출 표본을 보완******************************************

- 리드(안) 도출단계(1~3단계)별 선정기준의 변별력 제고, 정교화

예술자료 2차수집

○ 2차수집 대상자 수집 · 기술

- 각 대상자별 2~3차 수집(목록화 등 제반업무 수행을 위한 가인수인계) 완료 및 기술 진행 중

***		***** ***	*******		************	**
			*	***
*	***	***	***	***	**************************	**************************************
*	***	***	***	***		********
*	***	***	***	****		********
*	***	***	***	***	***********
*	***	***	***	***
*	***	*****	***	***	*********************************	*************
*	****	*	*	*	*********************************	**************************************
*	***	*****	***	***

○ 2차수집 대상자 인터뷰 영상제작

- ****** 인터뷰 질문지(안) 검토(12.26.) 및 인터뷰 진행(12.28.)

- 영상제작 규모 및 방법 변경

********************************

***********************************

*****************************

○ 1차 수집자료 등록·정리

- 기술규칙(안)을 바탕으로 1차수집자료 기술작업 진행

************************************************

기관자료 전수조사

○ 학예연구부 소장 실물자료 전수조사

- 학예연구부 캐비넷·책장 등에 배치 실물자료 전수조사 관련 추진방안 협의 완료(각 과별 담당자 목록작성하여 전달)

- 학예연구부 기관자료 전수조사 협조요청 공문 발송(12.12.)

∘ 학예연구부 캐비넷·책장 배치 기관자료 목록 송부요청(1.4. 예정)

○ 기관자료 전수조사 대상자료 목록화

- 본관 디지털자료 목록화 진행 중(1.4. 완료 예정)

작업실적			전체 대상량	진척도
11월	12월	누적
32,218	41,455	108,378	86,500	125%

○ ****** 자료 목록화 준비

- 수집자료 상자 목록정리(12.31.)

자료활용 기반조성

○ 2차 수집자료 유형별 디지털화 진행

공정	작업실적		전체 대상량	진척도
	금월	누적
스 캔	5,526면	6,112면	50,000면	12.2%
촬 영	-	-
인코딩	-	-

□ 향후계획(12월)

사업관리

○ 주간업무보고 및 월간업무보고 진행

○ 과업별 진척율 점검 및 관리

아트아카이브 리드개발 및 2차수집 계획 수립

○ 아트아카이브 리드개발(안) 최종 보완 및 확정

예술자료 2차수집

○ 2차수집 소장자별 수집(자료 가인수인계), 목록화·기술 추진

- 소장자별 최종 자료 가인수인계, 목록화·기술 추진

○ 2차수집 소장자별 인터뷰 영상제작 진행

○ 1차수집 자료 기술 추진

- 1차 수집자료 분류체계 검토, 자료 기술 추진

기관자료 전수조사

○ 학예연구부 소장 실물자료 목록 수합 및 전체 목록 검수

○ 기관자료 운영방안 초안 작성

○ ****** 자료 목록화 착수

자료활용 기반조성

○ 2차수집 자료 디지털화 추진

붙임	1. 12월 월간 업무보고서 1부.

2. 12월 주간 업무보고서 각 1부.

3. 과업별 산출물 각 1부.  끝.