총 30개 사업 18,440백만원

- 신규사업 17개 사업 10,043백만원

(시비 6,348백만원, 구비 2,495백만원, 구기금 1,200백만원)

연번		사 업 명	회계구분	예산액 (천원)	발주방법	설계/심사	발 주	비고
계				10,043,000
1	도 로 관리팀	차도유지보수공사 (연간단가) - 차도유지보수 공사 - 아이들이 편안한 골목만들기 (구주민참여) - 안전도로 행복쪽방(구주민참여) 주택가 골목길 도로포장(시주민참여) 식품기계골목 도로정비(시주민참여) 닭부산물거리 도로정비(시주민참여)	시비,구비	805,000 500,000 70,000 60,000 25,000 100,000 50,000	공개경쟁	′19. 1.	′19. 1.
2		도로시설물 유지보수공사(연간단가) - 도로시설물 유지보수공사 - 안전한 생활 안전도로 조성 (시주민참여)	구 비	510,000 500,000 10,000	공개경쟁	′19 1.	′19. 1.
3		이면도로(골목길) 도로파손 정비공사	구 비	200,000	공개경쟁	′19. 1.	′19. 1.
4		불량맨홀 정비공사	구 비	100,000	공개경쟁	′19. 1.	′19. 2.
5	보 도 관리팀	보도유지보수공사 (연간단가) - 보도유지보수 공사 - 다산로보도정비공사 - 시의회앞 보도정비공사 시도상 보도유지공사 시 주민참여(황학동)	시비,구비	1,198,000 500,000 100,000 120,000 448,000 30,000	공개경쟁	′19. 1.	′19. 2.
6		청파로 문화거리 (도로다이어트)조성공사	시비,구비	1,500,000	공개경쟁	′19. 3~4	′19. 4.
7		천주교 도보순례길 보행환경 개선공사(2차)	시비	250,000	공개경쟁	′19. 1~2	′19. 3.
8		을지로~수표로 보행환경 개선공사	시비	1,200,000	공개경쟁	′19. 3~4	′19. 4.
9		다산로 도시비우기 사업	시비	1,000,000	공개경쟁	′19.1~2	′19. 2.
10		약수역~버티고개역간 보행환경 개선 기본 및 실시설계용역	시비	100,000	공개경쟁	′19. 1~2.	′19. 2.
11	도 로 굴착팀	도로굴착 복구공사(연간단가)	구비(기금)	1,200,000	공개경쟁	′19. 1~2.	′19. 2.
12	도 로 조명팀	가로등시설물 유지보수공사 (연간단가)	구비	180,000	공개경쟁	′19. 1~2.	′19. 2.
13		보안등시설물 유지보수공사 (연간단가)	구비	200,000	공개경쟁	′18. 12.	′19. 1.	낙찰자 결정
14		노후 가로등 개량공사	시비	1,000,000	공개경쟁	′19. 1~2.	′19. 3.
15		가로등 노후선로 교체공사	구비	150,000	공개경쟁	′19. 1~2.	′19. 3.
16		퇴계로 가로등 개량공사	시비	350,000	공개경쟁	′19. 1~2.	′19. 3.
17		주택가 빛환경 개선사업	구비 시비	100,000	공개경쟁	′19. 1~2.	′19. 3.

- 이월사업 13개 사업 8,397백만원

연번		사 업 명	회계구분	예산액 (천원)	발주방법	계 약	공정율	비고
계				8,397,000
1	도 로 계획팀	남창동 도로개설공사	시 비	2,000,000	공개경쟁	′18. 7.	20%	토지및건물보상 선행
2		남산옛길 조성공사	시 비	770,000	공개경쟁	′18. 4.	30%
3		남촌탐방로 조성공사	시 비	1,607,000	공개경쟁	′18.10.	5%
4		청구로 패션문화거리 조성공사	시비,구비	1,000,000	공개경쟁	′18. 6.	60%
5	도 로 관리팀	회현동 우리동네가꾸기사업	시 비	700,000	공개경쟁	′18. 12.	5%
6		장충단로 도로사면 보수보강공사	시 비	488,000	공개경쟁	′18. 11.	5%
7		충무초교앞 보도육교 정비공사	시 비	220,000	공개경쟁	′18. 10.	90%
8	보 도 관리팀	필동 서애길 활성화를 위한 도시생활환경개선공사	국비,구비	1,008,000	공개경쟁	′18. 5.	70%
9		청파로 문화거리 조성사업 기본 및 실시설계용역	구 비	87,000	공개경쟁	′18. 4.	80%
10	도 로 조명팀	마른내로 가로등 개량공사	시 비	250,000	공개경쟁	′18. 8.	10%
11		청구로 가로등 개량공사	시 비	190,000	공개경쟁	′18. 10.	80%
12		남산옛길 가로등 설치공사	시 비	45,000	공개경쟁	′18. 3.	5%
13		회현동 우리동네가꾸기사업 보안등 신설공사	시 비	32,000	공개경쟁	′18. 12.	5%