문서번호	방재시설부-1202
결재일자	2019.1.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	01/28 이임섭
협 조

『노들섬 특화공간 조성공사』

조경시설물 시공방법 변경 실정보고 검토보고

2019. 1.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『노들섬 특화공간 조성공사』

조경시설물 시공방법 변경 실정보고 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『노들섬 특화공간 조성공사』의  책임사업관리자로 부터 조경시설물

(옥상녹화 식재플랜터) 시공방법 변경에 따른 실정보고 사항이 있어 검토

하여 보고 드림.  [관련공문 : 유탑노들 제19-11호(2019.01.21)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-6 일대 (노들섬)

○ 규    모 : 연면적 9,385㎡ (지상3층 4개동 : 업무시설, 문화 및 공연시설)

□조경공사 : 수목식재(교목120주, 관목8,320주), 조경시설 31종 등

○ 기    간 : 2017.10.26 ~ 2019.08.31

○ 도 급 비 : 152억원 (조경 25억원)

Ⅱ		실정보고

○ 추진경위

□‘19.01.04 : 조경시설 설계검토서 제출 (동심원조경기술사사무소 → MMK+)

□‘19.01.08 : 조경분야 설계사의견서 제출 (MMK+ → 감리단)

□‘19.01.21 : 책임사업관리자 기술검토서 제출 (유탑노들 제19-11)

○ 보고내용

- 노들섬 서측부지 건물2층 옥상녹화를 위한 플랜터기초 설치방법 변경에

따른 실정보고  [스틸엣지 4개소, 플랜터B 2개소]

▪건축물 조기준공(‘19.5.31)을 위한 동절기 시공방안 제시

(플랜턴 기초설치 변경 : 기초콘크리트 → 판넬연장 및 앙카설치)

※ 기초콘크리트는 동절기 타설 불가로 2월 중순이후 가능

▪당초 기초콘크리트 하부는 배수판을 연장하여 우기시 배수향상

→ 초화류 및 잔디의 건전생육 도모

○ 도급비 승인요청                                  (단위 : 천원)

구 분	단 위	당 초		변 경		증․감
		수 량	금 액	수 량	금 액
계			31,447		36,701	증)5,254
스틸엣지 (기초콘크리트)	m	178	11,942	-	-	감)11,942
스틸엣지 (STS 및 셋트앙카)	m	-	-	178	15,385	증)15,385
플랜터B (기초콘크리트)	m	71	19,505	-	-	감)19,505
플랜터B (내후판 및 셋트앙카)	m	-	-	71	21,316	증)21,316

※ 증액되는 도급비는 설계변경 증액없이 시공 (시공사 합의 사항)

Ⅲ		검토보고

○ 플랜터 기초변경

□서측부지 건물 2층에 시공되는 조경플랜터 6개소의 시설물기초

설치방법 변경에 따른 실정보고 사항으로

☞ 무근콘크리트 기초를 STS판넬 및 내후성 강판으로 연장하여 셋트앙카로 고정

→ 동절기 시공이 가능하여 3월 식재적기에 초화류식재 가능

☞ 기초콘크리트 설치부분을 배수판으로 추가 연결하여 우기시 배수기능 강화

○ 설계변경 적용

□상기 사유로 인한 설계변경시 당초계약금액으로 적용

[시공사 합의각서 제출 (‘18.12.18)]

Ⅳ		보고자 의견

○ 공기단축 및 옥상녹화 배수기능 향상이 예상되는 변경으로 판단되어

책임사업관리자가 제출한 실정보고를 승인조치하고

○ 변경에 따른 공사비 증가 부분은 금액변동 없이 추진하고자 합니다.

붙임 : 1. 시설물 위치도 및 기초상세도 1부.

2. 책임사업관리자 기술검토 의견서 1부.  끝.

시설물 위치도 및 기초상세도

서측부지 건물2층 조경시설 (스틸엣지 및 플랜터B)

스틸엣지 및 플랜터B 기초상세도 (당초 → 변경)