				★ ◎
문서번호	기계사업부-264			부 원			기계사업부장 직무대행			에너지기술사업처장 직무대행
보존기간	30년										01/22
				윤종호			박상현			허원
결재일자	2019.01.22
공개여부	비공개(7)			협조	건축공사부장 직무대행				조창희			토목조경공사부장 직무대행				오덕수
신내동 640 행복주택 건설공사
기계분야(소방포함) 설계변경에 따른 계약변경(제3차) 시행 보고
		서울특별시 SH공사
(기계사업부)

신내동 640 행복주택 건설공사

기계분야(소방포함) 설계변경에 따른 계약변경(제3차) 시행 보고

신내동 640 행복주택 건설공사와 관련으로 기계분야(소방포함) 2단계 설계도서에 의한 설계변경 및 현장여건 변화 등에 의한 설계변경에 따라 계약변경 시행코자 보고 함

관련근거

Ⅰ

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제72조

❍ 건축공사부-6270(2018. 11. 21. 설계변경 등에 따른 계약변경(제2차) 시행보고

❍ 기계사업부-3929[2018. 12. 27. 신내동 640 행복주택 건설공사 설계변경 보고(기계)]

❍ 대외1-감리-19-051(2019. 1. 17. 신내동 및 수유동 장기전세주택 건설공사 “신내동 640 행복주택 건설공사” 계약변경 승인 요청)

공사개요

Ⅱ

(단위 : 천원)

공 사 명	도 급 사	세 대 수	공사기간	도 급 비	건설사업관리용역사	비 고
신내동 640 행복주택 건설공사	(주)옥토, 명남종합건설(주), ㈜남일기업	229 (1개동, 지하1~지상24층)	2016. 7. 1. ~ 2019. 7. 9.	20,603,361	㈜유탑엔지니어링건축사사무소, ㈜영화키스톤건축사사무소

설계변경 현황

Ⅲ

구 분	주 요 내 용	비 고
건 축	-
토 목	-
조 경	-
기 계	· 에너지사용계획서에 의한 온수배관 보온재 상향 조정(20%) · 세대 화장실 변경(욕조 → 샤워부스, 일반장 → 슬라이딩장) · 공영주차장 자동제어 원격감시·제어 반영(서울시설공단 요청) · 지하주차장 소화배관 재질 변경(스테인리스강관 → 백강관) · 제1차 계약변경 소방내역 연산누락분 반영(직접비 22,859,828원)	소방기계 포함

계약금액 변경현황

Ⅳ

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
계		20,603,361,441	20,648,269,013	증) 44,907,572	별첨 내역서 참조
건 축		12,933,275,752	12,933,274,752	0
토 목		2,727,344,604	2,727,344,604	0
조 경		736,949,657	736,939,657	0
기계	기계설비	2,997,792,963	3,010,845,000	증) 13,052,037
	소방설비	1,208,009,465	1,239,865,000	증) 31,855,535

행정사항

Ⅴ

상기와 같이 설계변경 내역을 제3차 계약변경토록 계약부서에 통보

붙임  1. 신내동 640 행복주택 건설공사 설계변경 보고(기계)

2. 관련공문 사본 1부

3. 계약변경내역서(총괄).  끝.