투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	용역 계약변경 의뢰[하남선(5호선연장) 궤도공사(2공구) 감독권한대행 등 건설사업관리용역

1. 도시철도토목부-859호(2019.01.25.)와 관련한 내용입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인『하남선(5호선연장) 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구) 2차』에 대하여 아래와 같이 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(2공구)

나. 계약금액 : 일금 531,999,670원(총차)

다. 용역기간 : 2018.11.05. ~ 2019.12.09.

라. 계 약 자 : ㈜신승엔지니어링 외 2사

마. 변경사항

구 분		당 초	변 경	증,감	비 고
총차	계약금액	531,999,670원	563,199,670원	증 31,200,000원
	공사기간	2018.11.05. ~ 2019.12.09.	변경없음	-
2차 (1회)	계약금액	481,999,670원	513,199,670원	증 31,200,000원
	공사기간	2019.01.01. ~ 2019.12.09.	변경없음	-

바. 변경사유 : 궤도공사 계약금액 조정 및 야간공사에 따른 기술자배계획 변경.

붙임 : 1. 관련문서 사본 1 부.

2. 변경내역서 1부.

3. 계약변경 합의서 1 부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	김근수		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	01/29 정대현
협조자	주무관	최경호
시행	도시철도토목부-952	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청게천로 8(무교동 96번지) 플리미어플레이스 빌딩 9층	/
전화	02-772-7242	/전송	02-772-7306	/	kksu49@seoul.go.kr	/	부분공개(7)