문서번호	토목부-1699
결재일자	2019.1.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
백종임		명경출	01/30 김영수
협조
	주무관		서민석

가시설공법 변경 검토보고

[구로고가 철거공사]

2019. 01.

도시기반시설본부

(토 목 부)

가시설공법 변경 검토보고

[구로고가 철거공사]

「구로고가 철거공사」중 남부순환로의 안정성 증대 및 현장여건을 감안한 가시설 공법 변경에 관하여 검토보고 드림.

1		관련근거

❍ 광안건(구) 제2018-09(‘19.01.18.) : 실정보고(가시설 변경 검토보고)

2		공사개요

❍ 위    치 : 구로구 가리봉동 140(남부순환로, 디지털단지5거리 주변)

❍ 규    모 : 고가차도 철거(폭 18.5m, 연장 536m)

❍ 공사기간 : '18.8. ~ '19.6.

❍ 도 급 비 : 6,756백만원

❍ 시 공 사 : 새천년종합건설 주식회사 외 2개사

❍ 감 리 사 : 동부엔지니어링㈜ 외 2개사

3		추진경위

❍ ‘18.11.02 : 토질 조사 결과보고(고가 옹벽부 시·종점부) (감리단)

❍ ‘18.11.02 : 토질조사 내용에 따른 설계보완요청〔감리단⇒(주)이산〕

❍ ‘18.11.05 : 착수전  현안사항 검토보고(감리단)

❍ ‘18.11.08 : 구로고가 가설구조물 보완설계도서제출〔(주)이산⇒감리단〕

❍ ‘18.12.08 : 현안사항 보고(흙막이 가시설 H-PILE 근입장 및 어스앵커 공법 변경) (감리단)

❍ ‘18.12.27 : 가시설공법 검토 전문가 회의결과 보고(감리단)

4		건설사업관리단 보고내용

❍ 설계현황 : 지반상태 N=20, 가시설 어스앵커로 설계

❍ 고가 옹벽부의 가시설 H-pile 근입장이 2m∼2.5m로 설계되어 있으나, 5개 차로 중 3차로를 철거하고 잔여 2차로로 통행하여야 하는 여건으로 높은 안정성 확보가 요구되어 근입장을 연장시켜 안정성을 증대토록 계획하고,

❍ 가시설 설치구간 지반조사 결과를 반영하여 연약지반에 적합한 가시설 공법 적용에 대해 검토함.

1. 시험보링 결과

시점	종점

- 시점부 : BH-1(STA.0+240), N=6∼8

- 종점부 : BH-2(STA.0+560), N=10∼13

2. 설계사 보완설계(보링결과 내용 반영)

- (당초) N20 ⇒ (변경) 시점부 N6∼8, 종점부 N10∼13

구분	A-A 단면도(STA.0+320)
당 초
설계사 검토 (안)
최종 (안)
	전문가 회의(안전관리과, 기술지원감리원, 설계사) 결과 반영 ※ 매설지장물(Ø900mm 상수관로) 저촉 우려(30°⇒45°)

3. H-Pile 근입장 변경

가. 검토 내용

구 분	검토의견	비고
기술지원감리원(토질)	· 점성이 많은 사실토(연약지반)로 인근현장의 사례를 고려 근입장 연장
안전관리과	· 보링결과를 반영 근입장을 2.0m∼2.5m에서 3.0m∼3.5m로 일부 H-Pile 근입장을 조정함은 적정함
공통의견	· 최종터파기면보강 : H-Pile 근입부에 압성토(H=1.0m∼1.5m) 효과를 가질수 있도록 조치

나. H-Pile 근입장 변경(전문가 의견 반영)

구 분	적용결과		비고
근입장 연장 (70EA)	0.5m연장 : 17EA 1.0m연장 : 35EA 1.5m연장 : 18EA	8.5m 35m 27m
	합 계	70.5m
H-Pile 제외 (터파기 낮은구간 29EA) 전체 204EA⇒175EA	시점부 : 23EA 종점부 : 6EA	-120.2m -30.8m
	합 계	-151.0m

4. 어스앵커 변경

구 분	검토의견	비고
기술지원감리원(토질)	· N15이상 지반에 정착필요 · 연약지반에 적용하는 앵커로 변경
안전관리과	· 시점부 : 연약지반에 적용하는 앵커 적용 · 종점부 : 경계성 연약지반으로 연약지반용 앵커 적용
공통의견	· 설계축력이 10T∼20T미만으로 10T미만은 3강선 · 20T미만은 4강선으로 적용필요

5. 수량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증·감
1. 05 가시설
a-1. H-Pile 박기	천공후항타,300×300×10×15㎜	m	1,134	1,092	-42
a-3. H-PILE 뽑기	H-300x300x10x15	본	204	175	-29
a-7.철근 보걸이 설치 및 철거	D22×1.45m	개소	206	-	-206
a7-1.보걸이 설치 및 철거	L-100*100*10, L=1.76m	개소	-	206	206	신규
a-8.토류판설치 및 철거(T=8cm)	3개월 미만	㎡	294	247	-47
a-9.강재토류판	200x100x55x1.0T	㎡	1,176	989	-187
b-1. 어스앵커천공 강선 및 삽입	토사, φ105mm,4가닥	m	2,453	3,249	796
b-2. PC강선 제작 및 설치	φ12.7 X 4	공	201	-	-201
b-2-1. PC강선 구입	팩앵커, φ12.7 X 4	m	-	2,461	2,461	신규
b-2-2.. PC강선 구입	팩앵커, φ12.7 X 3	m	-	1,089	1,089	신규
b-7. 장비조립및해체	어스앵커	개소	1	5	4
b-9. PC강선 제거	팩앵커, φ12.7 X 4	m	-	2,241	2,241	신규
b-10. PC강선 제거	팩앵커, φ12.7 X 3	m	-	1,008	1,008	신규

6. 공사비 증·감 현황

(단위: 천원)

공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
가 시 설 공
직접공사비	288,517	428,982	140,465
제경비	107,210	174,382	67,172
공 급 가 액	395,727	603,364	207,637
부가가치세	39,573	60,336	20,763
도급금액	435,300	663,700	228,400

○ 적용단가

- 신규단가 : 강제협의율 적용(92.758%)

- PC콘 조립 및 인장(PC콘 7mm⇒12.7mm로 정정) : 협의율(낙찰율) 적용(85.516%)

5		검토결과

❍ 본 공사 가시설공사 관련 보링결과 및 전문가 의견(토질,구조)을 반영하여 남부순환로상 안정성 증대를 위해 확장형(팩형) 앵커로 변경하고, H-Pile 근입장을 연장 시공하는 것은 타당한 것으로 판단됨.

6		조치계획

❍	위 건에 대하여 실정보고 승인 통보하고 추후 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고 검토의견서 1부.  끝.