자재납품기한 연기의뢰서

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 노들섬 특화공간 조성공사 토목공사

나. 도 급 자 : 신성종합건설(주) 외 2개사

다. 공사현황

자재명	관급자재비	계약년원일	납품년월일	공사준공기한	비고
콘크리트 블 록	18,574,800원	‘18.12.3	‘19.1.2	‘19.8.31

2. 상기 공사의 관급자재 기한을 아래와 같이 연기 조치하여 주시기

바랍니다

가. 납품기한 연기현황

자 재 명	당 초	변 경	비 고
콘크리트블록	'19. 1. 2	'19. 8. 31	240일

나. 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

다. 지체상금부과여부 : 미 부과

라. 납품기한 연기사유

- 공사중 교통처리계획 등으로 선행공종이 지연되어 납품기한 연기

2019. 1.

작성자 : 지방시설주사     박상철 (인)

확인자 : 토목부장         김영수 (인)

서울특별시 경리관 귀하