투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인(조건부) 통보(소방행정타운 건립 기계설비공사))

1.업무지시현장 : 서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사 (주)삼천리이엔지, 서울

소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사 인천전기소방설비 주식회사,

서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사 주식회사 건일엠이씨, 서

울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사 (주)토문엔지니어링 건축사

사무소, 서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사 주식회사 건축사

사무소 건원엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-02-01 14:02:33

3.지 시 내 용

가. 소방(CM)제19-016호(2019.1.23.)호와 관련입니다.

나. 위 호와 관련, 『서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사』 시행 중 사업주관부서(소방재난본부)의 “지하복합훈련시설 조기 착공 요청 등”을 반영한 실정보고가 적정하여 우선 작업지시하니 시행에 만전을 기하여 주시기 바라며

다. 설계변경 금액이 50백만원을 초과하여 우리부 설계변경 심의 후 결과를 반영하는 조건으로 승인하니 설계변경 심의자료를 작성하여 제출하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							김도형			열빛총괄과장					02/01 여인웅
협조자
시행			설비부-1573									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02)3708-8619						/전송			02)3708-8659					/	dokebi@seoul.go.kr												/	대시민공개