문서번호	도로보수과-954
보존기간	년
결재일자	2019.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최완		이상희	02/07 신응수
협조	주무관		최병수
	주무관		박세근

2019년 노후포장도로 정비공사 추진계획`

『안전하고 쾌적한 포장도로 유지관리를 위한』

’19년 노후포장도로 정비공사 추진계획

2019. 2.

북부도로사업소

[도로보수과]

2019년 노후포장도로 정비공사 추진계획`

『안전하고 쾌적한 포장도로 유지관리를 위한』

’19년 노후포장도로 정비공사 추진계획

Ⅰ		관 련 근 거

□ ’19년 노후포장도로 정비공사 추진계획

○ 도로관리과-1561호(2019.1.25. 안전총괄관 방침)

⇒ 노후포장도로 정비 예산 재배정 및 추진 계획 통보

□ 예산재배정 현황

구 분	합 계	노후포장	긴급복구	맨홀정비	감리비	재료비	기타
금 액 (백만원)	10,804	7,646	1,932	875	234	76	20

Ⅱ		추 진 방 향

□ 아스팔트 포장 시공품질 향상

○ 아스팔트 포장 공용수명 증대 : 1등급 골재 사용 및 고내구성 포장

○ 서울형 포장설계법 포장 시행 : 동일로 버스전용차로(공릉역~태릉역)

○ 아스팔트 생산 및 현장시공 관리감독 강화

- 외부전문가 합동점검 : 외부전문가, 서울시, 품질시험소, 사업소

- 아스팔트 혼합물 생산 공장, 시공현장 : 책임감리원, 품질감리원

○ 시험포장 및 고내구성 포장구간 등 관리대장 작성하여 이력관리

□ 공사 조기발주 및 조기 집행 : 상반기 60% 이상

○ 선금 및 공사기성금 지급 등을 통해 조기집행 목표달성 집중추진

Ⅲ		세 부 추 진 계 획

□ 노후포장도로 사업별 예산 배분

사 업 명	구 분	예산(백만원)	비 고
합 계		10,804
노후포장도로 정비공사	1 구역	3,275	노원·도봉·강북구 관내
	2 구역	3,275	종로·성북구 관내
	차선 정비	1,000	긴급복구, 시행도로 포함
긴급복구공사		1,932	야간 긴급출동(291) 포함
불량맨홀 정비공사	신기술 공법	875	지명경쟁
건설폐기물 처리용역		96	맨홀·교통시설·세종로·직영
건설사업관리 용역	포장 감리비	234	굴착 감리비 별도
사무관리비		6	직영반 운영경비
공공운영비		2	직영장비 유류비·수리비
재 료 비		97	상온·가열아스콘 구매
자산및물품취득비		12	직영 노후장비 교체구매

□ 노후포장도로 정비공사 추진 계획

○ 타공사와 중첩 구간

- 공사기간, 중첩구간 등 재확인후 시공 불가시 추후 타노선으로 변경

○ 1,2구역으로 분할하여 시행 : 공사 집중에 따른 지연시공 방지

1 구역	5개 노선	동일로·월계로·도봉로 버스전용차로, 월계로, 노원로
2 구역	12개 노선	삼일대로, 율곡로, 자하문로, 새문안로, 삼양로, 보문로 북악산로, 아리랑로, 안암로, 인수봉로, 한천로, 광운로

□ 예산 조기 집행

○ 발주 시행 : 2월중 계약심사결과 통보후 공사 발주

○ 사업별 실착공

- 긴급복구공사, 불량맨홀정비 : 3월

- 노후포장도로, 건설사업관리용역, 차선도색 : 4~5월

○ 예산 조기 집행 : 상반기 60% 집행

- 공사 선급금, 기성금 및 물품대금 지급

□ 품질관리 철저

○ 품질시험 강화 : 혼합물 관리시험

- 조치계획

· 선정시험              : 실시 (기존과 동일)

· 혼합물 관리시험(재료) : 1일 30a 이상 정비시 실시

· 시공관리시험(코아)    : 30a마다 코아 채취(기존과 동일)

○ 혼합물 생산과정 및 시공현장 감독 철저

- 공사 현장에 감리 상주 및 관리감독 철저

○ 포장분야 품질확보 및 청렴성확보를 위한 교육 실시

- 혼합물 생산업체, 시공업체 및 감리 업체와 간담회 개최

- 교육일시 : 공사 및 자재 생산 업체 확정후 (4~5월)

Ⅳ		향 후 계 획

○ ’19.2. : 공사 계약심사 의뢰 및 심사결과후 발주

○ ’19.3~12. : 공사계약 및 포장공사 시행, 준공처리

붙임  1. 2019년 노후포장도로 정비계획 1부.

2. 2019년 정비공사계획 위치도 1부.  끝.