위탁공사 사업비 정산 세부내역

○ 총사업비 집행

구분	집행예산				비고
	계 약(방침서)	변경계약(공법)	최종계약(정산)	증감액
①공사비	8,810,000,000	11,183,000,000	10,827,000,000	-356,000,000	도급비
			6,912,000	6,912,000	자문비 등
②감리비	925,372,000	788,000,000	539,000,000	-249,000,000
③사업관리비	100,346,000	114,000,000	110,738,000	-3,262,000
④지장물이설비	1,250,000,000	838,000,000	753,618,530	-84,381,470
소 계	11,085,718,000	12,923,000,000	12,237,268,530	-685,731,470
폐기물처리비	-	-	8,807,000	8,807,000
기타(도시계획 등)	-	-	2,500,000	2,500,000
소 계			11,307,000	11,307,000
합 계	11,085,718,000	12,923,000,000	12,248,575,530	-674,424,470	조합 반납금액

연번	공 종	내 용	금 액	비고
1	상수도 전기방식장치	환기구 통로시설물 저촉 이설	28,000,000
2	토공 정산	사토 운반거리변경, 암판정 등	-124,000,000
3	재건축상가 연결통로	가벽,거더설치,측벽파일 존치	40,000,000
4	보도블럭 규격변경	고압블럭⇒투수판블럭, 경계석	80,000,000
5	PC 접합부 방수	누수 유도동판 추가설치	104,000,000
6	공사물량 정산		-194,000,000
7	서울시 디자인 심의	캐노피, 환기구 지상부 변경	127,000,000
8	4대보험 정산	실비정산	-296,000,000
9	기계.설비	물량정산	-7,000,000
10	야간할증 정산	품셈 노임만 적용	-114,000,000
	소 계		-356,000,000
11	지장물 검증 자문위원 수당 등		6,912,000
	합 계		-349,088,000

∎ 공사비 정산(계약 2017.10,  1차변경[공법변경] 2018. 1.  2차변경{최종정산 2018. 12}

- 지장물 검증 자문위원 수당 등 집행내역

① 2017. 05. 31 지장물 이설비 검증 자문위원 수당       :  750.000원

② 2017. 09. 19 공사비 적용비율 자문회의 자문위원 수당 :  450,000원

③ 2017. 12. 01 설계변경 소위원회 및 합동점검 수당     : 1,050,000원

④ 2017. 12. 22 위탁공사 조달청 계약수수료             : 3,762,000원

⑤ 2018. 01. 04 외부전문가 합동점검                    :  300,000원

⑥ 2018. 02. 02 설계변경 본부위원회 자문위원 수당      :   600,000원

소  계                                           : 6,912,000원

∎ 감리비 정산 (2017. 8. 1 ~ 2018. 12. 31 재정사업 감리비 중복분 감액)

- 당초 산정비       :   925,372,000원

- 변경(1차)시 산정비 :   788,000,000원

∙ 투입인월 (당초 : 50.00인월, 변경 : 33.727인월)

- 집행금액 : 788,000,000원 – 539,000,000원 = 249,000,000원(감액 조치)

∎ 지장물 이설비

- 당초 산정비       :  1,250,000,000원

- 변경(1차)시 산정비 :    838,000,000원

- 실 집행비

① 배전설비(가공2회⇒지중화)294,032,980원–92,953,750원 = 201,079,230원

② 가로수제거 강동구 납부                                139,496,000원

③ SK 텔레콤 유선 이설비                                 73,859,000원

④ SK 텔레콤 무선 이설비                                 22,692,710원

⑤ LG U⁺ 통신시설 이설비    74,700,000원+16,500,000원 =  91,200,000원

⑥ 드림라인 통신시설 이설비                               27,880.000원

⑦ KT 유선 통신시설 이설비  13,426,300원-855,600원    =  12,570,700원

⑧ KT 무선 통신시설 이설비                                34,718,390원

⑨ 도시가스 이설공사비(코원에너지)                        150,122,500원

소    계                                             753,618,530원

∎ 기타 세입

○ 사업관리비 및 폐기물처리비 : 119,545,000원

- 사업관리비 : 110,738,000원

- 폐기물 처리비 : 8,807,000원

※ 폐기물 처리비 : 335,773,000원(서울시 부담분+둔촌조합 부담분+시공사 부담분)

· 서울시 부담금 : 34,549,000원

· 조  합 부담금 : 8,807,000원

· 시공사 부담금 : 292,417,000원(도급비 감액조치)