문서번호	설비부-1808
결재일자	2019.2.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이병돈	김은덕	02/12 代여인웅

『G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사』

기계 설비공사 계약기간 변경 검토보고

2019. 2.

도시기반시설본부

【설   비   부】

『G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사』

기계설비공사 계약기간(1차수) 변경 검토보고

「G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사」의 기계설비 공사 계약기간(1차수) 변경에 대해 검토 보고 드림.

1		공 사 개 요

❑ 공 사 명: G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사

❑ 위    치: 서울시 금천구 가산동 345-58, 371-68, 345-91번지

❑ 규     모: 지하2층, 지상10층(최고높이 43.9m, 제1,2종 근린생활시설)

❑ 공사기간: 총차 2018. 4.17.~ 2020. 4.15.(계약일 2018. 4.11.)

- 1차 2018. 4.17.~2019. 2.15.

❑ 시 공 사: ㈜다원이엔에스, 동명건설(주), 대한엔지니어링 주식회사, 브니엘네이처 주식회사

❑ 감 리 사: ㈜펨코엔지니어링 건축사무소, ㈜무영씨엠

2		관련근거

❑ G밸리 문화 복지센터 건립공사 기계 설비공사 계약기간 변경(1차수. 총차수 변경) 승인요청(PC G밸리 제*******01호 , 2019. 2.12.)

3		검토내용

❑ 책임건설사업관리기술자 검토 의견

□ 건축공정 지연으로 인한 공사 기간 연장으로 인하여 후속공정인 기계 설비 공사 계약 기간 변경 요청을 검토한 결과 이상 없음

❑ 검토하여야할 사항 : 계약기간 변경

구 분		당 초	변 경	비 고
총 차	계약기간	************************	************************	*****
	계약금액	**************	**************
1 차	계약기간	************************	************************	******
	계약금액	************	************

※ 계약 금액 변동 사항 없음

4		보고자 의견

❑ 책임 건설 사업관리 기술자로부터 제출된 건축공정 지연으로 인한 공사기간 연장에 따른 기계설비 공사의 계약기간 변경은 타당하다고 판단됨.(당초 305일에서 500일로 195일 연장)

붙임  관련문서 각 1부.  끝.