투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기요청[도시철도 하남선(5호선 연장) 1단계 송변전공사)

『도시철도 하남선(5호선 연장) 1단계 송변전공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한(금차)을 연기 요청

하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 도시철도 하남선(5호선 연장) 1단계 송변전공사

나. 계약현황

계 약 명		계 약 기간		계약번호 (관리번호)
		당 초	변 경
도시철도 하남선(5호선 연장) 1단계 송변전공사	총차	’18. 5.31. ~ ’21. 2.23.	’18. 5.31. ~ ’21. 2.23.	18*******00 (1*******00)
	금차	’18. 5.31. ~ ’19. 2.14.	’18. 5.31. ~ ’19. 6.30.

다. 변경사유 : 선행공정 지연으로 준공기한 연기

라. 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙   임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	이재돈		송변전과장	서태창		도시철도설비부장	02/12 구자훈
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	도시철도설비부-1284	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7271	/전송	772-7308	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	대시민공개