5. 강남소방서 청사환경개선공사

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 : 2014. 1월~2014. 6월

○  규    모 :

- 강남소방서 청사환경개선공사 : 65,000천원

○  총사업비 : 금65,000천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
시 설 비	65,000	57,509	3,000	62,000	4.6%

○  사업추진 실적

추진계획	추진실적
◦추진계획수립 : 1월 ◦기술용역타당성심사 : 2월 ◦설계계약 및 입찰 : 3월 ◦설계준공 : 4월 ◦공사입찰 및 계약 : 5월 ◦착공 : 5월 ◦준공 : 6월 ◦공부정리 등 : 6월	◦방침수립 : 2.20. ◦기술용역타당성심사 완료 : 2.28. ◦실시설계용역 : 3.14 ~ 4.12. ◦공사입찰 및 계약 : 5월 ◦석면철거공사 : 5. 19~6.2 ◦환경개선공사 : 5. 21~6.17

Ⅲ. 사업추진 애로 : 없음

작 성 자	소방행정과 장비회계팀장 : 윤영재 담당자 : 김은덕

33. 영동119안전센터외1개소 방수공사 등

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 : 2014. 1월~2014. 6월

○  규    모 :

- 영동119안전센터 방수공사 : 17,741천원

○  총사업비 : 금17,741천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
시 설 비	17,741	14,917	0	17,741

○  사업추진 실적

추진계획	추진실적
◦추진계획수립 : 1월 ◦방수공법 자료 및 견적조사 : 2월~5월 ◦공사입찰 및 계약 : 6월 ◦착공 : 6월 ◦준공 : 6월 ◦공부정리 등 : 6월	◦추진계획수립 : 1월 ◦방수공법 자료 및 견적조사 : 2월~5월 ◦견적안내공고 : 5.30~6.3. ◦공사업체선정 및 계약 : 6. 5. ◦착공 : 6. 9~

Ⅲ. 사업추진 애로 : 없음

작 성 자	소방행정과 장비회계팀장 : 윤영재 담당자 : 김은덕