문서번호	토목부-2811
결재일자	2019.2.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
백종임		명경출	02/21 김영수
협조

- 광복교~안양교 도로확장공사 -

건설사업관리용역(4차) 발주계획

2019. 02.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 광복교~안양교 도로확장공사 -

건설사업관리용역(4차) 발주계획

『광복교~안양교 도로확장공사』건설사업관리용역을 전체계약 금액내에서 금차(4차)용역을 발주하여 공사관리에 만전을 기하고 함.

※ 2019년 예산(감리비) 950백만원

Ⅰ				관련근거

○ 건설사업관리용역(4차) 설계도서 제출〔동부엔지니어링 2019-231호(19.2.18)〕

Ⅱ				용역개요

○ 용 역 명 : 광복교~안양교 도로확장공사 감독권한 대행 등 건설사업관리용역

○ 위    치 : 구로구 개봉동 198-82 ~ 구로동 693-2

○ 규    모 : 도로확장 폭4~5차로, 연장 1.1km

○ 용역기간 : '16. 04. 27 ~ '22. 01. 31(4차 : ‘19.02.21 ~‘20.01.23)

○ 용 역 비 : 4,058백만원(4차 : 950백만원)

○ 감 리 사 : 동부엔지니어링㈜ 외 2개사

Ⅲ				추진경위

○‘16. 03. 03. : 건설사업관리용역 발주

○‘16. 4. 27. ~‘17. 3. 17 : 1차용역 시행

○‘17. 3. 18. ~‘18. 2. 28 : 2차용역 시행

○‘18. 3. 01. ~‘19. 2. 20 : 3차용역 시행

Ⅳ				발주계획

□ 발주현황(4차)

○ 용역금액 및 용역기간

(단위 : 천원)

구분	전 체	1차	2차	3차	4차(금회)	장 래
용역금액	4,508,000	500,000	764,000	920,000	950,000	1,374,000
용역기간	‘16.04.27 ~ ‘22.01.31	‘16.04.27 ~ ‘17.03.17	‘17.03.18 ~ ‘18.02.28	‘18.03.01 ~ ‘19.02.20	‘19.02.21 ~ ‘20.01.23	‘20.01.24 ~ ‘22.01.31

○ 건설사업관리기술자 배치계획

구분 (기술자)	등급	투입기간(착수후,월)											개월	비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
책임	특급												11.13
토목	고급												11.13
토목	고급												11.13
토목	고급												5.36	구로고가
토목	중급												1.36	구로고가
토목	중급												7.13
토목	중급												10.36
전기	중급												2.18

○ 추진일정

- ‘19.02.21 : 용역(4차) 착수

- ‘20.01.23 : 용역(4차) 준공

Ⅴ				조치계획

○ 상기와 같이『광복교~안양교 도로확장공사 건설사업관리용역』에 대하여 전체 계약금액 내에서 금차(4차) 용역을 발주하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 건설사업관리용역(4차) 설계도서(설계내역서 포함) 1부.  끝.