문서번호	설비부-2725
결재일자	2019.2.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이강욱	김은덕	02/28 임정규

『시민생활사박물관 리모델링 증축 기계공사(승객용 승강기)』

관급자재 변경 검토보고

2019.02.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시민생활사박물관 리모델링 증축 기계공사(승객용 승강기)』

관급자재 변경 검토보고

「시민생활사박물관 리모델링 증축 기계공사」와 관련 관급자재인 승객용 엘리베이터의 운행속도 및 용도변경에 대한 검토결과 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ ㈜경호엔지니어링종합건축사사무소 시생박(건설관리) 제585호(2019.02.07.), 승객용 승강기 실정보고서 제출

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 시민생활사박물관 리모델링 증축 기계공사

□ 공사위치 : 서울시 노원구 공릉동 622번지, 구)북부지원

□ 공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적 6,919.78㎡),주차장(1,975㎡)

□ 납품기한 : 2019.04.07

□ 계약업체 : 수림엘리베이터(주) 대표 박정우,(주)서우전기 대표 이미선

□ 계약금액 : 226,226,000원(조달수수료 별도,총액계약)

Ⅲ		변경사항

□ 변경사유

- 설계오류에 의한 운행속도 및 용도를 구조물과 적정하게 부합하는 엘리베이터 재선정

□ 변경내용

구분	1호기(본관동)		2호기(구치감동)		3호기(주차장)		비고
	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후
PIT(mm)	1,500	1,800	1,500	1,500	1,500	1,500
OVER HEAD(mm)	4,300	4,300	3,750	4,300	3,450	4,300
용도	전망용	전망용	전망용	승객용	전망용	전망용
인승	30	30	17	17	15	15
카속도(m/min)	90	60	90	60	90	60

□ 변경금액

(단위 : 원)

품목		계약금액				계약기한	구매관리번호	계약번호
		품대	조달수수료	소계	증,감
승강기	변경전	226,226,000	1,927,850	228,153,850	감 2,841,170	‘19.4.07	12182033000	12182036000
	변경후	223,613,220	1,699,460	225,312,680		변경없음

※지분율 : 수림엘리베이터(주)(99.78%), ㈜서우전기(0.28%)

□ 감리단 검토의견

- 승객용 엘리베이터의 운행속도는 건축구조 와 층수를 감안할 때 90m/min에서 60m/min로 변경하고,

- 구치감동 승강기는 설계오류(건축도면과 불일치)로 전망용에서 승객용으로변경하는 것이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		조치의견

□ 책임건설사업관리기술자가 검토한 기계공사 승객용 엘리베이터 운행속도 및 용도 변경 실정보고건에 대하여 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어, 규격변경 내용을 계약부서인 총무부에 수정계약 의뢰하고자 함.

붙임  1. 검토 보고서(감리단) 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.