문서번호	교통운영과-3504
결재일자	2019.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
양은범		이유국	03/04 강진동
협조	주무관		차양호
	주무관		박평근

2019년 도로점용공사장

교통소통대책 자문회의 결과 보고(제2차)

2019. 2.

도시교통실

(교통운영과)

2019년  도로점용공사장

교통소통대책 자문회의 결과 보고(제2차)

제2차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의{’19.2.28.(목)}를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2019. 2. 28.(목) 16:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

○ 참석위원 : 8명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 7명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : 송두석 위원, 신건철 위원, 이동원 위원, 김은경 위원, 홍지연 위원, 이경아 위원, 정필현 위원

- 간  사 : 교통개선팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 3건 (조건부 시행 2건, 재심의 1건)

□ 자문회의 결과

□ 공통사항

○ 용역계약서를 첨부하기 바라며,

○ 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

□ 구로고가차도 철거 구간 내 노후 송배수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
남부순환로	2019.03.25. ∼05.31.	야 간	1~2개 차로	강서도로사업소 (급수운영과)

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 공사내용에 따른 굴착장비 제원을 고려한 작업공간 등을 고려하여 도로점용면적을 조정하시기 바람

- 7단계 공사시 직진차로 확보를 위해 우회전 차로 이용방안을 검토하기 바람

- 송배수관 공사에 대한 공사 표준도를 첨부하기 바람

· 500mm, 900mm 매설 방안

· 관 크기에 따른 장비제원, 장비의 회전 반경 등

- 테이퍼를 설계 속도에 맞게 재조정

- 신호체계를 조정하여 지체를 줄일수 있는 방안에 대해 검토하시기 바람

□ 개봉고가 성능개선 사업

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
경인로	약 45개월	전일	고가차도 및 하부1개차로	교량안전과

○ 자문결과 : 재심의

- 교통혼잡비용 및 장기간 공사 민원 등을 고려, 공사기간 단축방안 재검토

- 교통량(오전 오후 첨두) 및 분석결과를 전면 재확인하시기 바람

- 고가차도 통제로 인한 주변도로에 미치는 교통영향을 면밀한 산정하여 차로 운영 등 교통소통대책 재수립

- 공사단계별 우회동선이 변동되므로 차량운전자 혼선을 방지 대책 수립.

- 빔 가설시 고가차도 하부도로를 최대한 이용할 수 있는 방안을 검토하시기 바람

- 공사구간내 버스정류장, 건물 및 아파트 출입구 등이 누락되어 현황조사를 재조사 하여 도면에 반영하기 바람

- 거더 설치시간은 교통량에 따라 재조정

- 공사구간 주변 버스정류장 이설을 검토하시기 바람

- 보고서 오타를 수정하시기 바람

□ 광명~서울 고속도로 민간투자 사업

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
방화대로	약 60개월	전일	1~2개 차로	서서울고속도로(주)

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 6단계 공사시 유턴은 사고 위험성이 높으므로 신호등 설치 등의 대책을 강구하시기 바람

- 6, 12, 16, 17단계 공사시 신방화사거리에서 직진차로수가 감소하여 정체가 우려되므로 현황차로를 확보하는 방안을 검토하시기 바람

- 11, 12, 16, 17단계에서 좌회전차로가 포켓으로 구성되지 않아 차로 변경에 따른 정체가 우려되므로 좌회전 차로는 포켓으로 구성하시기 바람

붙임  1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단 1부.  끝.