투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	남부순환로 사성교 구간 공사 지연 조치

****님 안녕하십니까?

우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드리며, 문의하신 사항에 대해 아래와 같이 답변드립니다.

1. 공사진행 현황

- 예정공사 기간 : 2016.04.01.~2021.12.31.

- 공정률 : 50%

- 시공업체 : KCC건설

- 감리업체 : 동부엔지니어링외 2개사

2. 공사 지연사유

- 사성교(안양교)가 안양천에 위치하고 있어 하천관리기관인 서울지방국토관리청의 하천점용 승인 조건에 따라 매년 우기철(5.15~10.15) 하천공사 금지 등으로 공기를 연장함.

향후 일정은 3둴 초(금주)에 신설 사성교(안양교) 구로IC방향을 개통할 예정이며, 우기철 전까지 오류IC방향의 기존교량 철거하고, 2021년까지 오류IC방향 교량을 신설하여 준공할 계획입니다.

시정에 많은 관심을 가져주셔서 감사드리며, 더 궁금하신 사항은 도시기반시설본부 토목부(백종임, 02-3708-8666)로 문의해 주시면 성심성의껏 답변드리겠습니다.

주무관							백종임			도시고속도로과장					03/05 명경출
협조자				주무관						서민석
시행			토목부-3450									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-8666						/전송			02-3708-2599					/	ba100@seoul.go.kr												/	부분공개(6)