				★차장			팀장	교통정보처장	도로관리본부장
문서번호		교통정보처-1483
보존기간		준영구		협 조			팀장
결재일자		2019.03.08.					도로환경처장
공개여부		공개					도로관리처장
「2019년 주요사업 핵심과제」 재난상황 대응강화를 위한 재난 통합모니터링 시스템 구축
			2019. 3
						교통정보처

「2019년 주요사업 핵심과제」

재난상황 대응강화를 위한 재난 통합모니터링 시스템 구축

도시고속도로 침수 등을 대비 재난대응 통합모니터링 시스템을 구축하고 교통통제 차단기능을 강화하여 안전사고를 예방하고자 함

※ 관련근거

- 교통정보처-7110(’18.12.07.)호,“동부간선도로 침수사고 예방을 위한 교통통제지점 차단기 및 CCTV 설치공사 발주계획”

- 교통정보처-244(’19.01.14.)호 “2019년도 교통정보처 주요사업계획서 제출”

1		추진배경

□ 기상이변, 국지성 집중호우시 예상치 못한 안전사고 위험 내재

【사례】’18.8.28. 서울동북부 집중호우로 동부간선도로 침수피해 발생

➡ 침수사고 예방을 위한 교통통제 강화 필요

□ 신속 ‧ 정확한 상황판단을 위한 효율적 현장상황 감시체계 필요

○ CCTV 등 감시체계 분산운영으로 현장 상황파악 어려움

(교통정보처) 교통상황용 157개,  (도로시설처) 지하차도 19개

(도로환경처) 청소 복구, 제설작업 별도상황실(목동) 운영

○ 현장상황 공유 강화를 위한 통합모니터링 시스템 필요

- 교통관리센터 공간특성상(CCTV 등 영상정보 집결), 재난발생시 실시간 상황파악이 가장 용이

- 재난으로 인한 긴급 상황발생시 현장상황 공유기능 강화를 위한 현장설비 및 시스템 보강

<종합상황실 운영현황>

2		추진계획

□ 재난상황 통합 모니터링 시스템 구축(센터)

○ 사업개요

- 대상노선 □ [수방] 동부간선로, 올림픽대로/강변북로(한강)

□ [제설] 내부순환로, 북부간선도로

- 추진방안 : 전산 유지보수업체 협업 및 자체인력 활용 구축

- 주요기능(재난통합센터)

‣비상발생시 교통정보, 도로관리처, 도로시설처, 경찰 합동근무

‣전용맵 으로 재난상황(수방, 제설)시 취약구간 집중 모니터링

⇒ 상황판 활용, 침수, 통제, 작업 등 전체상황 일괄 확인․전파

‣통합 모니터링 시스템 연계로 공단 도로환경처, 市 재난대책본부 등 관련부서(기관) 활용 지원

<재난통합센터 운영>

○ 사업내용 : 노선별 전용맵 구성 ➡ 재난 상황별(수방․제설), 단계별 운영 시나리오 구축․운영

- 교통상황용(157)+지하차도(19)+연결로․본선통제용(44) CCTV 통합

- 재난유형, 상황단계, 위험요소별 등 상황별 운영시나리오 구축

- 사용자(비상근무자) 편의성 고려 및 통제지점별 ID체계 구축

○ 추진일정

’19. 3월	➡	’19. 4월	➡	’19. 5월
‣ 재난통합 운영프로그램 개발 - 상황별 전용맵 구성 - 지도기반 운영프로그램 개발		‣ 현장 통제시설과 프로그램 연계작업 - CCTV, 차단시설 등 ‣ 시범운영 및 보완		‣ 시스템 운영 - 상황실 상황판을 활용한 통합운영

□ 동부간선도로 침수대비 교통통제 수방설비 구축(현장)

○ 사업내용 □ 진입램프 통제용 차단기 설치 : 36대(기존 보수 22, 신설 14)

□ 교통차단 감시용 CCTV 설치 : 44대(램프 26, 본선 18)

□ 재난관리 주요기관 영상연계망 구축

<주요기관 및 현장 CCTV  센터연계 구상도>

○ 추진일정                                  * ‘18. 2월 사업별 구매 및 공사계약완료

’19. 3월	➡	’19. 4월	➡	’19. 5월
‣ CCTV 및 차단기 설치		‣ 센터 영상설비 및 네트워크 장비 구축 ‣ 주요 재난관리기관 영상연계망 구축		‣ 시스템 운영

○ 소요예산 : 929백만원(市 재난관리기금)

3		기대효과

□ 안전모니터링체계 강화 : 재난 현장상황을 실시간으로 확인 및 공유, 정확한 상황판단 및 신속한 조치 가능

□ 비상상황 대응능력 제고 : 유관기관간 정보공유 강화로 비상시 합동대응 가능

4		행정사항

□ 해당 시설 유지관리관련 업무협의(도로관리처 등)

□ 시스템 운영을 위한 센터 리모델링 등 환경 구축

□ 시범운영 전 시연 및 사용자 교육 추진                             끝.

[붙임] 재난 통합모니터링 맵 구성 및 대응 시나리오

□ 노선별 전용맵 구성(안)

<동부간선도로>	<올림픽대로, 강변북로>
	<제설관리구간 전체>

□ 동부간선도로 수방상황 대응시나리오 예시

단계(상황)	중점사항(시나리오)
주의 (수의상승)	신속한 통제판단을 위한 주요 상황 모니터링
	수위표(월계, 월릉), 주요침수구간(월계, 월릉, 중랑, 성동), 본선 및 진출램프 소통상황
통제 (침수예정)	통제지점별 통제여부 확인
	본선 및 램프별 통제상황, 침수구간별 인접 통제상황
침수 (전면통제)	침수구간 및 통제구간 진입차량 확인
	침수구간 현황 파악, 통제구간 진입차량 확인, 침수구간별 인접 통제상황
복구 (재개준비)	복구작업 및 통행 여부 확인
	작업(침수)구간 상황, 본선 및 램프별 통제상황