투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	현장점검 결과통보 및 협의(구북부법조단지 및 시민생활사박물관)

1. 시민생활사박물관 리모델링 공사』 및 『구 북부법조단지 환경개선공사』와 관련입니다.

2. 귀사에서 건설사업관리 및 시공하고 있는『시민생활사박물관 리모델링 공사』 및 『구 북부법조단지 환경개선공사』에 대하여 현장점검 결과를 통보하오니 조치사항 및 조치계획을 2019. 3. 14일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 설계변경 사항이 발생할 경우 실정보고하여 승인을 득한후 시행하여 주시기 바랍니다.(실정보고시 필요한 경우 설계자의 의견서 첨부)

[현장점검 내용 (점검일 2019. 3. 5), 박물관과 요구사항]

가. 시민생활사박물관 관련

옥상 방수전 다음사항 조치계획을 수립하고 건설사업관리자 및 공사관리관 입회시공

- 누름콘크리트 상부 표면 부스럼 현상 부분 조치계획

- 기존 구조물 파손 및 누수부분 보수계획

- 우수드레인, 옥상구조물 페드부분, 계단실, 승강기, 연결통로 등 방수취약부분 및 방수계획 상세도 작성

- 시공후 담수시험 실시 및 본관B동 옥상 아스팔트 기시공부분 담수시험실시

나.  구 북부법조단지 환경개선공사 관련

- 주차장 상부 방수공사시 상기 옥상방수전 조치계획과 동일하게 조치하고 시행요망

- 우오수 관로공사 설계변경시 시행계획서 작성하여 실정보고 요망

- 주차장 옥상 드레인 및 트렌치 배수용량 계산 적정여부 및 배수계획 상세도면 작성제출요망(일부 옥상 우수선홈통 유입부분 용량포함)

다. 공통사항

- 여성공예센터 입주자로부터 소음진동으로 불편민원 발생 해당공종 발생시 반드시 여성공예센터장에게 사전 협의하여 불편사항이 최소화 될수 있도록 조치요망

- 여성공예센터 이용자들의 화물입출이 불편하지 않토록 지상 출입구앞 주차장이용에 지장이 조치요망.

- 건설사관리책임기술자는 발주청의 지시사항이나 공정회의시 거론된 사항은 반드시 발주청에 보고후 시공요망

- 시공자 및 건설사업관리자는 새로 시작되는 세부공정 착수시 설계적정성 검토후 공사관리관에게 보고후 시공

라.  박물관과 협조사항

- 구치감동과 여성공예센터 사이 철골회랑 설치시 채광이 어려움 검토요구됨

마. 박물관과 요구사항

- 별첨 박물관과 요구사항에 대하여 검토후 반영여부 및 조치계획 제출

붙임 : 박물관과 요구사항 관련공문 3건. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
수신자					건설사업관리책임기술자(경호엔지니어링),,시민생활사박물관 증축 및 리모델링공사 현장대리인(제이엔이건설),구북부법조단지환경개선공사 현장대리인(지엔지건설),서 울 특 별 시 장(박물관과장)
주무관							송옥의			건축관리과장					차무흥					건축부장					03/12 임인구
협조자
시행			건축부-3840									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (프리미어플레이스빌딩 13층)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2651						/전송			02-3708-2659					/	sssoookkk@seoul.net												/	부분공개(5)