문서번호	설비부-3446
결재일자	2019.3.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
곽진곤		임병국	03/13 임정규
협조

「시립노원청소년 직업체험센터 신축 전기공사」

관급자재 구매계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

「시립노원청소년 직업체험센터 신축 전기공사」

관급자재 구매계획 검토보고

우리 본부에서 추진 중인「시립노원청소년 직업체험센터 신축 전기공사」관련, 주관부서 추가 보완사항 요청 공종에 소요되는 관급자재 구매계획 검토 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 시립노원청소년 직업체험센터 신축 전기공사

○ 위   치 : 서울시 노원구 노원로 16길 6-21(혜성여고 인접 부지)

○ 공사규모 : 태양광발전설비(12KW),수배전반 1면, 조명등 644개, 기타 부대공사 1식

○ 공사기간 : 2017. 11. 15 ~ 2019. 3. 14.

○ 도 급 비 : 535,873(천원)

○ 시 공 사 : ㈜선광전설(감리자: (주)신흥종합건축사사무소)

○ 공 정 율 : 토목(97.56%), 전기(97.34%)

□ 검토내용

○ 관련근거 : 주관부서 전기공종 추가 보완요청(「시립노원청소년직업체험센터 건립 설계변경 요청」, 서울시 청소년정책과-3999호(2019.3.5.))

○ 운영부서 요구사항

- 주차장 출입구 주차관제(차단봉) 설치 (주차장 진출입 혼란 해소)

- CCTV 추가설치(기계실, 관리실, 옥상3개소)

- 전자강의 및 전자안내 시스템 설치 (지하1층 ~ 지상3층, 각층)

□ 관급자재 발주 계획

○ 관급자재 소요예산 : 137,328천원

공 종	품 명	규 격	수량(대)	금 액(천원)	계약방법
주차장 주차관제	차량차단기	3M, LED BAR,자동	1	1,950	조달구매
	차량인식기	130만화소,LED	2	21,000	〃
	주차제어장치	I5이상, S/W포함	1	10,500	〃
	주차안내판	자립형,2*6열	1	2,100	〃
	차량감지기	루프코일,4L/C	5	200	〃
전자강의· 전자안내 시스템	전자교탁	전자유도방식	4	16,800	〃
	데스크톱컴퓨터	슬로탑G-3FE7, I5	4	3,280	〃
	인터랙티브 화이트보드(전자칠판)	IR센서,LED,손터치	8	67,200	〃
	DID 영상 게시판	SYS-W-550-M,55인치	4	13,560	〃
		조달수수료	0.54%	738
		합 계		137,328

- 예산과목 : 평생교육정책관 청소년담당관, 건전한 청소년육성 및 복지서비스증진, 청소년시설확충 및 운영개선추진, 시립청소년 직업체험센터건립, 시설비

○ 구매방법 : 조달구매

- 관련규정: 조달사업에 관한 법률 제5조의 2(계약체결의 요청) 및 같은법 시행령 제9조의3 제1항 제2호 등

□ 보고자 의견

○ 상기 요청 건은 공사준공 기한(2019.3.14.)에 임박한 시점에 추가 보완요청한 사항이므로 준공일정(도급공사)과 별개로 관급자재만 발주, 주관부서(청소년정책담당관)에 납품처리

○ 단, CCTV 추가설치 건은 조달구매가 불가하므로 주관부서(청소년정책담당관)자체처리

□ 향후 계획

○ 2019. 3월 : 관급자재 발주 및 계약

○ 2019. 5월 : 관급자재 설치 완료(예정)

○ 2019. 6월 : 운영관리부서 입주완료(예정)

붙임 : 주관부서 요청공문 2부.  끝.