투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(콘크리트기초)납품기한 연기 의뢰 [남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사]

1. 도시기반시설본부 설비부-3474(2019.03.13.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진중인 「남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사」에 소요되는 관급자재(콘크리트기초)의 납품기한을 아래와 같이 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동 사거리) 평탄화사업 전기공사

나. 납품기한 연기요청 내역

품명	납품요구번호	계약업체	계약금액(원)	납품기한		비고
				당초	변경
콘크리트기초	12-18-1-31785-00	㈜현암	15,904,000	19.03.15	19.12.31.	계약금액 및 수량 변경없음

다. 연기사유 : 선행공정(토목) 지연으로 관급자재 설치 시기 미도래

라. 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 납품기한 연기검토 보고서 1부.

2. 감리단 납품연기요청공문 및 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	공혜성		환경설비과장	김오열		설비부장	03/13 임정규
협조자
시행	설비부-3481	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)