서울 북부수도사업소 내진보강공사

구조감리용역 과업지시서

2019. 3.

북부수도사업소

구조감리용역 수행지침

1. 용 역 명: 서울북부수도사업소 청사 본관동 내진보강공사 구조감리용역

2. 용역기간: 감리용역 착수일로부터 건축 준공예정일 +14일까지

(단, 내진보강공사 완료 시 감리용역의 준공을 앞당길 수 있음)

3. 목적 및 현황

가. 목적: 본 공사 구조감리용역은 내진보강공사를 추진함에 있어, 건축구조기술사 전문기술의 확보 및 시공의 품질을 확보하고 감리업무의 효율을 기하기 위함을 목적으로 한다.

나. 건물현황

1) 건물명: 서울 북부수도사업소 청사 본관동

2) 위  치: 서울특별시 강북구 번2동 377

3) 시설규모 및 현황

건물명	연면적(㎡)	규 모	구조형식	최초 준공년도	비 고
본관동	2,644.13	지하1층/지상4층	철근콘크리트	1989년

4. 공사감리

가. 배치기준: 책임감리원-건축구조기술사, 비상주감리원-건축구조부분 고급기술자를 배치하여 내진보강공사의 구조감리업무를 수행하여야 하며, 구조부분 업무를 수행한 유경험자로 컴퓨터를 활용하여 업무에 필요한 각종 문서작성을 할 수 있어야 하며, 업무수행능력이 부족하다 판단될 시에는 교체할 수 있다.

나. 업무수행: 구조감리 업무수행에 있어서는 별도 정하는 것을 제외하고는 기술용역계약 일반조건과 본 수행지침에 의하며 지원업무수행자가 지시한 사항에 대하여 수행한다.

다. 지원업무수행자의 업무: 발주기관에서 지정하는 지원업무수행자는 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 감리원의 지도, 점검과 발주 기관의 지시사항을 전달

라. 시공관리

1) 감리원은 공사진행단계(진행중, 준공직전), 공사준공단계 3회에 걸쳐 설계도서에 작성된 내진보강 상세 시공도면을 사전 검토하여 감리를 진행한다.

2) 감리원은 시공자가 실시한 각종 측량성과 등을 검측, 확인하고 시공계획, 품질관리계획, 사용자재의 적합여부, 안전점검사항 등을 검토ㆍ확인한다.

3) 감리원은 현지조건과 설계도서를 연계 검토하여 시공자가 공사를 원활히 수행할 수 있도록 검토의견을 제시하여야 한다.

4) 감리원은 시공자의 업무와 책임을 면제시킬 수 없으며 임의로 설계를 변경시키거나 기일연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 안 된다.

5) 감리원은 시공자가 설계도서에 의거 관계법령에 일치하게 시공하는지의 여부를 수시 확인하여 설계도서, 공사시방서 및 공사계약서 내용대로 시공되지 아니하였을 경우 즉시 그 내용을 발주처에 보고하여야 한다.

6) 감리원의 업무수행은 내진설계 시 확정된 설계로 공사를 진행하며(설계서 임의변경 불가) 변경 불가피 시 감독관의 검토 후 변경하여야 한다.

마. 공정관리

1) 감리원은 당해공사가 정해진 공기 내에 시방서, 도면 등에 의거하여 완성될 수 있도록 지도 점검하여야 하며, 공사추진상 문제점을 도출하여 해결방안을 제시하고 공사가 부진할 경우 부진사유 및 만회대책 등 필요한 조치를 취하고 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

바. 시공지시 등

1) 감리원은 시공자가 설계도서, 시방서, 기타 관계서류의 내용과 적합하지 않게 시공하는 경우에는 공사중지, 재시공 등 필요한 조치를 취하고 이에 관한 사항을 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

2) 감리원은 시공자가 이에 응하지 않을 경우에는 법 제42조 규정에 의한 조치를 취하도록 발주기관의 장에게 요구하여야 한다.

사. 준공검사

1) 내진보강부분 준공검사 시행

2) 감리원은 시공자가 제출한 기성 및 준공검사원을 실제 시공현황과 비교 검토한 후 감리조서를 첨부하여 발주처에 제출한다.

3) 감리회사 대표자는 구조부분 준공검사 수행계획을 발주기관의 장에게 통보하고 준공검사를 실시하며, 그 조서를 작성하여 발주기관에 제출하여야 한다.

4) 최종 준공감리보고서는 각 2부 제출한다.

아. 최종감리보고서 제출할 사항

1) 감리수행 현황(일자별 감리 수행 내용 및 조치결과, 증빙자료)

2) 품질관리 현황(재료검사 및 시험성적 확인사항 등)

3) 건축물 구조부분 준공검사 및 검사조서, 현황도면, 공사감리 완료보고서

자. 준공처리에 필요한 서류제출 요구 시 즉시 작성 제출하여야 한다.