문서번호	설비부-3901
결재일자	2019.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		여인웅	03/20 임정규
협조
	특화공간조성팀장		신명승

『노들섬 특화공간 조성 통신공사』

관급자재(AV설비) 변경 구매 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『노들섬 특화공간 조성 통신공사』

관급자재(AV설비) 변경구매 검토 보고

『노들섬 특화공간조성 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재(AV설비) 구매변경 요청에 대해 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 통신공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.16. ~ `19.5.08.

□ 도 급 비 : ******

□ 계 약 자 : ㈜신성글로벌네트워크

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `18.11.13. : 노들섬 특화공간 조성사업관련 사업계획 변경방침 통보(공공재생과-10913)

○ `19.03.19. : 노들섬 특화공간조성 통신공사 관급자재(AV설비) 발주 요청[유탑노들 제19-100호)

□ 관급자재(AV설비) 변경 구매 계획

(단위 : 천원)

품 명	규격	장 소		금 액			비고 ******
		당초	변경	당초	변경	증감
AV설비	도면 참조	다목적홀, 리허설룸, 공연장	다목적홀 공연장	*******	*******	********	******

□ 변경사유

○ 사    유 : 운영부서(공공재생과) 요구사항 반영

○ 요구사항 : 공연장 기능 향상

- 노들섬 공연장 규모와 활용계획을 감안하여 라이브 하우스 성격을 강화시키기 위하여 조명 및 음향장비 확충필요.

- 리허설룸 조명장비 및 음향장비 설치 제외

○ 추진내용

- ’18.11.13 : 노들섬 특화공간 조성사업관련 사업계획 변경방침 통보(공공재생과-10913)

- ’19.01.21 : 공공재생과, 도기본, 운영사, 감리단, 설계사 회의결과 반영(물품, 규격, 수량 등 협의)

- ’19.03.19 : 노들섬 특화공간조성 통신공사 관급자재(AV설비) 발주 요청[유탑노들 제19-100호)

□ 주요변경사항

(단위 : 천원)

공 종	주요변경사항	당초금액	변경금액	비고(증감)
공연장 음향설비	스피커, 앰프 등 삭제 무선 마이크 6ch 감소	*******	*******
공연장 영상설비	브라켓외 전체 삭제	******	***
공연장 AV설비	비상시 일반방송 절체기 외 삭제	******	***
리허설룸 음향설비	음향 전체 삭제	******	*
리허설룸 음향설비(옵션)	비상시 일반방송 절체기 외 삭제	******	***
다목적홀 음향설비	안테나 추가 등	******	******
다목적홀 영상설비	변동 없음	******	******
다목적홀 AV설비	블루레이 플레이어 삭제 아이맥 반영	******	******
기 타	전동스크린 및 모니터 외 삭제	******	*****
설 치 비		******	*****
소 계		*******	*******
제 경 비	VAT 포함	******	******
합 계		*******	*******	********

※ 조달수수료 별도

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 노들섬 특화공간 활성화를 위하여 공연장, 다목적실, 리허설룸 주요 제안이 반영되었으며, 당초 시방서 및 규격의 동등이상 품목을 선정되었음

○ 현장 지정장소 반입 설치 조건이며, 현장여건 협의, 검토 이외의 사항은 통신공사 관급시방서 준수 할 것.

Ⅲ		조치의견

○ 운영부서 요구사항을 반영한 건설사업관리단의 관급자재(AV설비) 변경 구매에 요청사항을 검토 한 결과 적정한 것으로 판단되어 구매 하고자 하며, 총무부에 구매 의뢰 하고자 함.

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.