문서번호	도시공간개선단-4088
결재일자	2019.3.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공건축팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
조훈희	육근형	김승수		03/25 김태형
협 조	주무관		민비라
	주무관		송지윤

마을건축가 연계사업

2019년「우리동네키움센터」공간개선 추진 계획

2019. 3.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

마을건축가 연계사업

2019년「우리동네키움센터」공간개선 추진 계획

우리시 방과후‧방학 등 학교 외 초등 공적돌봄 인프라를 조성, 온마을이 참여하는 돌봄체계를 구축하기 위한 2019년 ｢우리동네키움센터｣ 공간개선사업 지원을 위해 건축가 선정, 사업 지원 방안을 보고드림.

1		사업 개요

□ 추진 근거

○ ｢아동복지법｣ 제44조의 2(다함께돌봄센터)  ※ ’19. 4월 시행예정

○ ｢온마을아이돌봄 지원에 관한 조례｣ 제7조(돌봄시설의 설치‧운영)

○ 민선7기 공약 21번 - ｢틈새 없는 초등돌봄 서비스｣ 전면 확대

□ 공공책임 지역기반 보편적 방과후 돌봄강화

□ 방과전, 방과후, 저녁, 방학 초등돌봄 등 틈새 초등돌봄체계 구축

- 방과전(7-9시), 방과후 저녁(17시 이후) 돌봄, 방학 돌봄 등 초등돌봄 공백에 대응하는 체계 구축

2		추진 경과

○ 온마을 돌봄체계 구축 ｢우리동네키움센터｣ 확충계획 수립 : ’18.10.30.

○ ｢우리동네키움센터｣ 공간개선사업 총괄건축가 자문            : ’19.1.4.

○ 2019년 ｢우리동네키움센터｣ 설치·운영 계획               : ’19.2.28.

○ 2019년 ｢서울시 마을건축가｣ 위촉                           : ’19.3.4.

○ ｢온마을 아이돌봄 체계｣ 구축 기본계획                  : ’19.3.6.

○ ｢우리동네키움센터｣ 공간개선 마을건축가 참여 협조 요청 : ’19.3.20.

3		2019년 ｢우리동네키움센터｣ 공간개선 추진 계획

□ 사업 개요

	｢우리동네키움센터｣
○ 설치목적 : 마을 중심 아이돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소 ○ 설치주체 : 지방자치단체장(운영 : 자치구 직영 또는 위탁) ○ 이용대상 : 돌봄이 필요한 6∼12세 아동(소득무관, 초등학생 중심) ○ 설치공간 : 안전하고 접근성이 좋은 공공시설 등 유휴공간 리모델링 활용 ○ 종 사 자 : 상근 1인(관리자), 시간제 4인(돌봄선생님, 키움코디)

□ 사업 대상

○ 연차별 추진목표 - ’19년 94개소 신규설치, ’22년까지 400개소 확충

연도		’18	□	’19	□	’20	□	’21	□	’22
신규설치 (누적)		4개소 (4개소)		94개소 (98개소)		119개소 (217개소)		119개소 (336개소)		64개소 (400개소)

○ 설치 유형

- ｢일반형｣ 키움센터 본격 설치·운영, ｢융합형｣ 시범운영, ｢거점형｣ 프로그램 개발

일 반 형		✚	지역아동센터형			✚	융 합 형			✚		거점형(아난딸로)
· 우리마을에, 걸어서 · 친구들과 쉬고 노는			· 복지중심의 돌봄 · 드러나지 않게 배려하는				· 우선보호 + 틈새돌봄 · 모두 함께 어울리는					· 문화‧예술‧창의 · 체험하고 성장하는

일반형	:	주민생활과 밀접하고 가까운 공공시설 내 설치(도서관‧주민센터 등)

융합형	:	｢우리동네키움센터｣·｢지역아동센터｣ 상생 운영모델 마련 시범운영

거점형	:	문화·예술·체육 체험형 돌봄시설, 아동·청소년예술교육센터 연계 설치

○ ’19년 사업 대상

- 2019년 ｢우리동네키움센터｣ 선정 심사위원회(1차) 개최 : ’19.1.29.

▹7개 자치구 15개 키움센터 설치 대상지 선정

- 2019년 ｢우리동네키움센터｣ 선정 심사위원회(2차) 개최 : ’19.2.19.

▹10개 자치구 20개 키움센터 설치 대상지 선정

- 2019년 ｢우리동네키움센터｣ 선정 심사위원회(3차) 개최 : ’19.3.18.

▹13개 자치구 27개 키움센터 설치 대상지 선정

※ 1~2차 선정심사 시 선정된 35개소 중 6월 개소 예정 대상지 11개소 및 3차 선정심사 27개소 공간개선 설계 지원(도시공간개선단)

※ 6월 이전 개소 사업대상지 24개소는 자치구 자체 추진

※ 4차 심사위원회(’19. 4~5월 중 예정)를 통하여 일반형 약15개소 추가 선정 및 융합형 약17개소(‘19. 하반기 중 예정)로 총 70개소 추진 예정

’19년 추진 개소	1차 심사	2차 심사	3차 심사	4차심사 이후	비고
94개소 (70개소 마을건축가 추진)	15개소 (자치구 자체추진)	20개소 (11개소 마을건축가 추진)	27개소 (27개소 마을건축가 추진)	32개소 (32개소 마을건축가 추진)	개소일정은 사업대상지 현황에 따라 다름

□ 추진 방향

○ 사업총괄MP 및 마을건축가 자치구 MP 제도 운영을 통한 사전기획단계 강화 및 협의 과정 관리

- 3월 현재 17개 자치구 38개소 추진 예정

※ 4차 심사위원회 결과에 따라 MP 및 마을건축가 추가 배정 예정

구분	역할
사업 총괄MP	·사업비전·정책방향 제시, 기본 및 실행계획 등 사업계획 총괄 기획 및 진행 ·사업 관련 이해관계 총괄조정
자치구MP	·사업 총괄MP 지원 및 세부분야 총괄(참여건축가 등)
마을건축가	·우리동네키움센터 설계, 시공 관리 ·우리키움참여단 활동

○ 참여건축가 선정 및 배정

- 마을건축가를 중심으로 선정하되, 필요시 별도 선정을 통한 추가 인원 확보

- 참여건축가 희망자 접수 후 MP단을 중심으로 사업대상지별 마을건축가 배정

※ 자치구 자체 추진 24개소는 마을건축가 자치구 MP 자문 지원

○ 6월 ~ 11월 사업대상지별 개소 일정에 따른 설계 및 시공 계획 수립

- 6월 개소(12개), 7월 개소(10개), 8월 개소(8개), 9월 개소(7개), 11월 개소(1개)

○ 아이의 눈높이에 맞춘 키움센터 공간구성 가이드라인 개발

- ｢우리동네키움센터｣ 공간구성의 품질 유지와 안전성, 리모델링 과정의 효율적 진행 지원을 위해 참여건축가와 공간디자인 가이드라인 개발 추진

※ 보건복지부 ｢2019 다함께돌봄사업 안내｣ 준수

○ 마을건축가 활용, 센터별 지역‧아동 특성을 고려한 맞춤형 디자인

- ｢우리동네키움센터｣ 세움가이드라인을 사업 참고자료로 활용

- 자치구․센터별 마을건축가를 매칭, 건축가와 아동, 부모, 종사자, 관계자 등 온마을이 참여해 공간설계 추진

○ 기획, 설계, 시공 등 단계별 모니터링 실시

- 설계보고회, 현장점검, 결과보고 등 진행과정 관리

- 부모, 아이 및 마을활동가 등으로 구성된 ｢우리키움참여단｣의 키움센터 조성 전 과정 모니터링

4		행정 사항 및 향후계획

□ 부서별 업무 분장

아이돌봄담당관	｢우리동네키움센터｣ 설치 사업 총괄 사업대상지 선정 및 예산 지원
도시공간개선단	｢우리동네키움센터｣ 공간개선 지원 MP 및 참여건축가 배정 설계 및 시공 부문 지원 및 모니터링
자치구	｢우리동네키움센터｣ 공간개선 시행 설계, 공사 등 용역 발주 및 감독

□ 행정 사항

*******************************

*****************************

****************************

********************************

**************************************

***************************************

***********************************************

- 예산과목 : 도시공간개선단, 도시경관개선, 도시공간 환경수준 향상, 서울시 마을건축가 운영, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

□ 향후 계획

	○ ｢우리동네키움센터｣ 참여건축가 선정	: ’19.3.
	○ ｢우리동네키움센터｣ 공간개선 추진	: ’19.4.~11.
	○ ｢우리동네키움센터｣ 사업 홍보	: ’19.12.

붙임  1. ｢우리동네키움센터｣ 공간개선 목록 1부.

2. ｢우리동네키움센터｣ 공간개선 설계대가(안) 1부.

3. 2019년 ｢우리동네키움센터｣ 설치·운영 계획 1부.

4. ｢온마을 아이돌봄 체계｣ 구축 기본계획 1부.

5. ｢2019 다함께돌봄사업 안내｣ 1부.  끝.