문서번호	녹지관리과-1065
결재일자	2019.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	푸른광장팀장	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
이상철	송형래	권종화	03/27 박미애
협 조

시민열린마당 근로자휴게실 이전계획

2019. 3.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

시민열린마당 근로자휴게실 이전계획

(옛)의정부 터 발굴조사 계획에 따라 광화문 시민열린마당 관리시설 (근로자 휴게실, 차고 등)을 이전하여 공원 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 광화문 시민열린마당 시설현황

○  위    치 : 광화문 시민열린마당(종로구 세종로 76-2)

○  사용인원 : 12명(남6, 여6)

○  시설규모 : 근로자 휴게실(남·여구분, 40㎡), 창고(40㎡),

작업차량 주차(2.5t 2대, 1t 1대), 화장실 및 샤워장(1동)

[근로자 휴게실 및 창고]	[화장실 및 샤워장]

□ (옛)의정부 터 발굴조사계획에 따른 이전 협의(역사문화재과)

○ 의정부터 발굴조사를 위한 이전 협조 요청 (’17.7.)

○ 열린시민마당내 근로자휴게실 등 이전 협의 (’17.7.~’18.12.)

- 열린시민마당내 수목 이전 완료 및 (옛)의정부 터 발굴조사 시행

※ 현재 근로자 휴게실 및 창고 부지를 제외한 부지에 대하여 발굴조사 진행중

○ 근로자휴게실, 작업차량 주차 등 관련부서 협의(’19.1.)

- 주차계획과(서울시설공단)와 근로자휴게실, 주차장 사용 등 이전 협의

Ⅱ		사업개요

□  사 업 명 : 광화문시민열린마당 내 근로자 휴게실 이전 사업

□  위    치 : 세종로공원(종로구 세종대로 189)

□  사업기간 : 2019. 4.1. ~ 4.30.

□  사 업 비 : 50백만원

□  사업내용 : 근로자 휴게실 리모델링 및 창고 조성, 주차장 확보

Ⅲ		근로자 휴게실 등 이전계획

【 추진방향 】

□세종로공영주차장 사무실을 리모델링하여 휴게실, 샤워장, 창고 조성

□손수레 등 부피가 큰 장비는 세종로공원 지상에 창고를 조성하여 보관

□녹지대 작업 차량은 세종로공원 지하주차장 등 주변 주차장 이용

□  근로자 휴게실(창고, 샤워장 포함) 이전

○ 위    치 : 세종로공영주차장 지하1층 111호 (종로구 세종대로 189)

※ 장소사용 승인 (서울시설공단 교통시설운영처-1718, ’19.2.13)

○ 면    적 : 153.84㎡(전용: 111.74㎡, 공용: 42.1㎡)

○ 사업내용 : 근로자 휴게실 및 창고 조성

- 휴게실은 직원 및 근로자들의 의견수렴을 통해 쾌적한 공간으로 설계

- 화장실은 세종로공영주차장 지하 내 공용화장실 이용

- 휴게실 집기는 기존 근로자 휴게실 집기를 활용

□ 세탁기 및 냉장고 등은 배·급수 설치가 용이하지 않아 불가피하게 개별 사용

□ 에어컨 실내기 설치거리가 멀어 기존 에어컨의 냉방효율이 낮아져  불가피하게 시스템 에어컨 설치, 기존 에어콘은 남산 산하공원에 활용 검토

※ 세부사항은 붙임1의 휴게실 리모델링(안) 참고

[세종로공영주차장 부대시설 입구]	[세종로공영주차장 부대시설 내부]

□  자재 및 장비 보관 창고시설 설치

○ 위    치 : 세종로공원 지상

○ 면    적 : 창고(18㎡)

○ 사업내용 : 손수레 등 부피가 큰 장비 보관을 위한 창고 설치

- 주위환경과 조화로운 창고 외관으로 경관훼손 및 민원 사전예방

[세종로공원 지상 창고 조성 위치도]	[세종로공원 지상 창고 조성 위치(안)]

□  녹지대 작업차량 주차공간 확보

○ 보유차량 : 트럭(2.5t) 2대, 트럭(1t) 1대

○ 확보방안 : 세종로공원 지하주차장 및 주변 공영주차장 이용

- 1톤 트럭은 세종로공원 지하주차장에 주차

- 2.5톤 트럭은 주변 공영주차장을 이용할 수 있도록 주차계획과와 협의

※ 세종로공원 주변 공영주차장 이용 불가시 사업소 주차장 활용 검토

Ⅳ		소요예산

□ 사업예산: 총 50백만원       ※ 세부내용은 붙임2 참고

□ 예산확보방안

○ 소요예산 50백만원 중 30백만원은 자체 예산 확보

※ 예산과목: 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 시설비

○ 20백만원은 의정부터 발굴조사 수행부서인 역사문화재과의 협의로 조경과에서 예산 재배정을 통하여 집행 (역사문화재과-5246, ’19.3.20.)

Ⅴ		추진일정 및 행정사항

□ 추진일정

○ 리모델링 예산 재배정 요청(→조경과)	: 2019. 3.

○ 리모델링(안) 협의(→서울시설공단)	: 2019. 3.

○ 근로자휴게실 등 이전 공사	: 2019. 4.1.~ 4.30.

○ 근로자휴게실 이전	: 2019. 5.1.(예정)

□ 행정사항

○ 근로자 휴게실 이전 예산 재배정 요청: 조경과

붙임 :  1. 근로자 휴게실 리모델링(안) 1부.

2. 근로자 휴게실 이전비용 산출내역. 1부.  끝.