투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	철거공사(실내마감재,옥상누름) 실정보고 보완 통보 [시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사]

1. 시생박(건설관리)-제673(2019. 3. 19.)호 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 귀사에서 제출한 『시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사』의 ‘철거물량(각 층 바닥마감재, 옥상 무근콘크리트) 누락분’에 대한 실정보고서를 검토한 결과, 물량산정 산출근거 및 증빙자료가 미비한 부분이 있어 아래와 같이 보완 통보하니, 재검토하여 제출하시기 바랍니다.

○ 보완 사항

1) 지상1층 바닥 수량산출서 및 도면 면적 불일치

2) 별관동 옥상 면적 산출근거 미첨부

3) 본관A,B동 지상1층 실측사진 중복 및 불명확

4) 구치감동 지상2층 철거두께 산정기준 미달

5) 구치감동 옥상 실측 사진의 콘크리트 두께 적용 가능 여부 판단이 어려움

6) 본관B동 옥상 및 본관A동 지상4층 실측사진 두께 측정 부정확

※ 실정보고서에서 요청한 추가 철거분(두께 80mm) 산정을 위해서는 당초 철거내역에 반영된 바닥마감(두께 60mm)을 포함하여 140mm이상의 철거가 확인 되어야 하는바, 명확한 물량 확인 증빙이 안되는 부분에 대하여는 반영 불가함.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
수신자					(주)경호엔지니어링 종합건축사사무소,제이앤이건설(주),(주)현재엔지니어링
★주무관							서경식			건축관리과장					차무흥					건축부장					04/06 임인구
협조자
시행			건축부-5603									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-2635						/전송			3708-2659					/	lcidb@seoul.go.kr												/	부분공개(5)