투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[박물관과 공사변경 요청사항 반영 검토 지시]

1. 업무지시현장: ㈜경호엔지니어링 종합건축사사무소, 제이앤이건설(주)

2. 작 성 일 자: 2019-04-05 15:04:59

3. 지 시 내 용

가. 박물관과-3630(2019.04.05.)호와 관련입니다.

나. 우리본부에서 시행중인 『시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사』와 관련, 사업의뢰부서에서 아래와 같이 공사변경(유리휀스 지지방식 및 외부옹벽 마감) 요청이 있어 업무지시하니,

구분(공종)	요 청 내 용	변경 사유	비 고
투명유리휀스 설치	ㄷ자 유리집 → 포스트 스파이더 고정식	안전사고 방지	옥외 연결통로
외부 옹벽 마감	수성페인트 → 스톤코트	유지관리	사업부지 경계

다. 건축분야 변경사항에 대하여 면밀히 검토하여 시행하시기 바라며, 설계변경사항에 대하여 조속히 보고바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One- PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

★주무관							서경식			건축관리과장					代송옥의					건축부장					04/06 임인구
협조자
시행			건축부-5605									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-2635						/전송			3708-2659					/	lcidb@seoul.go.kr												/	부분공개(5)