투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시지방경찰청장(교통관리과장)
(경유)
제목	교통처리계획에 대한 준공기한 연기 요청(남부순환호 평탄화공사)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 교통관리과-20246호(2017.7.18.)와 관련입니다

3. 『남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사』시행 중 위호로 승인통보 받은 교통 안전시설 개선·설치 통보(하달)건과 관련하여 준공기한 연장에 따라 교통처리계획 공사기간 변경을 아래와 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관련근거 : 교통안전시설 개선·설치 통보(하달) [남부순환로 평탄화공사(변경)]

나. 사   유 : 준공기한 연기

다. 위치 및 변경내용

○ 공사명 : 남부순환로(개봉1동사거리)평탄화공사

○ 위  치 : 남부순환도로(서부트럭터미널 지하차도 시,종점 ~ 오류IC, 1.1Km)

○ 변경내용

공 사 기 간		세부위치	변경(개선) 내용		비고
단계	당 초		당 초	변 경
	변 경
1단계 ~ 11단계	‘16.06~‘19.03.24	남부순환로 (서부트럭터미널 지하차도 ~ 오류IC)	측도일부구간 통제 (배수관 부설공사)	변경없음	단계별 도면 및 변경사항첨부
	‘16.06~‘20.12.31 (단계별 날짜변경 있음)		차선통제 후 우회처리(배수관 부설공사 및STA0+000~0+220(우)노상 성토작업 진행)	변경없음

붙    임 : 1. 교통처리계획서(공사기간 변경) 1부.

2. 공사변경계약서 1부.

3. 관련공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이한규		광역도로과장	代이한규		토목부장	전결 04/08 김영수
협조자
시행	토목부-5938	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2556	/전송	02-3708-2599	/	lhg2023@seoul.go.kr	/	대시민공개