문서번호	설비부-5260
결재일자	2019.4.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	열빛총괄과장	설비부장
김도형	여인웅	04/11 임정규

「소방행정타운 1단계 건립 기계설비공사」

설계변경 소위원회 조치결과 보고

2019. 4

도시기반시설본부

(설 비 부)

「소방행정타운 건립 1단계 기계설비공사」

설계변경 소위원회 조치결과 보고

「소방행정타운 건립 1단계 기계설비공사」책임건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경 소위원회 자문의견 조치결과에 대하여 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사

□ 위    치 : 은평구 진관동 110-26(은평뉴타운 3-1지구)

□ 규    모 : 본관동 외 5개동(연면적 25,174[eqn: m ^{2}])

□ 공사기간 : 2016.06.01. ~ 2019.07.31

□ 공사금액 : 7,911백만원

□ 도 급 사 : ㈜삼천리이엔지, 인천전기소방설비(주)

□ 감 리 사 : ㈜건축사사무소 건원엔지니어링, ㈜토문엔지니어링, ㈜건일엠이씨

Ⅱ		관련근거

□ 설계변경 소위원회 지적사항 조치결과 보고(소방CM제19-78, ’19.4.9.)

Ⅲ		소위원회 지적사항 조치결과

□ 소위원회 개요

- 일    시 : 209.03.05.(금) 10:00~11:30

- 장    소 : 도시기반시설본부 14층 회의실

- 자문위원 : 위원장 시책사업과장, 위원 추한영 외 5명

- 자문결과 : 조건부 가결(자문위원 지적사항 보완 조건)

□ 주요 지적사항 및 조치결과

- “붙임- 소위원회 지적사항 조치결과” 참조

□ 심의결과 반영금액

(단위 : 원)

항목	당초	심의요청	심의반영	심의요청 대비증감	비고
**	*************	*************	*************	***********
**	*************	*************	*************	**********
***	*************	*************	*************	**********

□ 건설사업관리단 검토의견

-『서울 소방행정타운 건립(1단계) 기계설비공사』의 설계변경(총차6회) 요청에 대한 소위원회 심의결과(지적사항)의 시공사 조치결과에 대해 적정성을 검토한 결과, 적정하게 조치한 것으로  검토되어 보고함

- 현장 원활한 공정관리를 위해 설계변경 계약이 조속히 진행될 수 있도록 검토 후 조치 요청.

Ⅴ		조치의견

□ 설계변경 소위원회 지적사항에 대해 적정하게 조치되었다는 건설사업관리단   의 의견이 타당하므로 건축부로 설계변경을 의뢰하고자 함.

붙임 : 소위원회 지적사항 조치결과 1부.  끝.