문서번호	도시철도설비부-5233
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
정해철	임정규	06/11 정찬웅

9호선 2단계 건설구간 시운전 상황보고

(2014.6.10)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

도시철도설비부

9호선 2단계 연장구간 시운전 상황 일지

2014.6.10.(화)

□ 금일실적

급전	단전	시험시간
08:58	17:16	08:00~17:00

○ 시험 내용

- 신호 TDC 시험(진로 운행제어)

· 930하선 궤도회로 점유정보, 선로전환기 전환정보 데이터 확인

※ 궤도회로 14개소, D101, 102선로전환기

· 신호기 및 진로표시정보 전자연동시험(D1, D4)

· 접근쇄정확인(8개소), 회차구간 확인

- 1단계~ 2단계 연결작업(하선) - 야간시험

· 궤도분야 : 1~2단계 궤도연결 용접

· 신호분야 : 1~2단계 연결구간(TU-box, 종단보드 철거, 925궤도 튜닝)

928신호기계실 SDTC 튜닝(상선)

○ 참여인원 : 15명 (본부 : 5명, 시공사 : 6명, 감리 : 1명, 기관사 2명, 운영사1명)

※상황실 및 신호시험 : 이용기, 김종옥, 최경수, 정해철, 이진근

□ 본선 출입승인

일자	구분	회사명	작업구간	작업내용	작업인원	비고
6/10	신호	삼영전업사	926~925	신호기 이설 및 1단계 경계부 신호설비 철거	황수효외 3명	20:00~ 00:00
	궤도	한일철도	926~925	1단계구간 경계부 궤도 용접작업(하선)	이채남외 5명	20:00~ 익일04:00
6/11	신호	현대정보기술	926~925	925 궤도튜닝 및 1,2단계 연결작업(하선)	전영근외 16명	01:30~04:30

□ 6.11.(수) 시험계획

○ 신호시험

- TDC(Track Data Checking) 시험

· 928 신호기계실 구간(상선) 운행제어시험

· 궤도회로 점유정보, 선호전환기, 신호기 상태정보 등.

- 1~2단계 연결작업

· 925 신호기계실간 광통신시험, 사전연동시험 등. 끝.