투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	물가변동으로 인한 계약금액 조정(E-S, 제2회)승인 통보(남산예장자락)

1.업무지시현장 : 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) 주식회사 동성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-04-11 10:04:42

3.지 시 내 용

1) 남산예장 감리 제2018-377호(‘18.11.13) 및 081호(’19.2.27)와 관련입니다.

2)「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」에 대한 물가변동으로 인한 계약금액 조정(E/S, 제2회)건은 요건충족되어 아래와 같이 승인통보하오니 물가변동 조정금액은 추후 변경계약시 반영토록하고 설계변경으로 인하여 증·감시 정산반영에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 승인현황

(단위:원)

구 분	물가변동 조정		비 고
	①요구	② 승 인
물가변동 대상공사의 계약금액(B)	21,105,120,730	21,105,120,730
물가변동 적용제외 계약금액(C)	4,266,352,390	4,266,352,390
물가변동 적용대가(D)	16,838,768,340	16,838,768,340
물가변동 조정율(A)	4.00 %	4.00%
물가변동 등락 대상 조정금액(G)	673,550,000	673,550,000
선금급 공제금액(F)	40,950,000	40,950,000
(가) 선금급 지급일	2017.09.18	2017.09.18
(나) 선금급	2,800,000,000	2,800,000,000
(다) 선금급지급비율(E)	42.156%	42,156%
물가변동 조정 적용금액	632,600,000	632,600,000

끝.

주무관							김소연			방재시설과장					진재섭					방재시설부장					04/11 代진재섭
협조자				주무관						노진우
시행			방재시설부-5116									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 (무교동, 프리미어플레이스 빌딩 14층)															/
전화		02)3708-8763						/전송			02)3708-8756					/	ruracom@seoul.go.kr												/	부분공개(7)