문서번호	역사문화재과-7249
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
소장	문화재관리팀장	역사문화재과장
황정로	정진순	04/16 정영준

2019 남산골 한옥마을

관람환경 개선사업 시행 계획

2019. 4

역사문화재과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2019 남산골 한옥마을 관람환경개선사업 시행 계획

남산골 한옥마을 전통정원내 천우각 주변 노후시설물 등에 대하여 관람환경 개선사업을 실시하여  쾌적한 휴식 및 편의 공간을 제공하고자 함.

Ⅰ		사업 개요

□  사업명 : 남산골 한옥마을 관람환경개선사업

□  위  치 : 천우각 광장 및 주변

□  사업기간 : 2019. 1. ~ 8

□  사업내용

□ 천우각 광장 포장 및 야외무대 교체

□ 우배수 시설 설치 등

□  소요예산 : 360,000천원

□  예산과목 : 문화본부 역사문화재과, 역사문화 유산의 계승발전, 전통문화시설 운영, 남산골 한옥마을 관람환경개선사업(시민참여), 시설비

Ⅱ		추진 내용

□  2019. 1. ~ 4. : 설계용역 발주 및 완료

□ 용역기간 : 2019.2.8.~2019.4.8

*********************************

*****************************

□ 주요내용 : 사업계획안 작성 및 도면, 내역서 등

□ 추진내용

- 2019.1.28 : 기술용역 타당성 심의 완료(기술심사담당관)

- 2019.3.14 : 설계안 주민설명회 개최 완료(필동주민센터)

- 2019.3.28 : 서울시 지정문화재 등 현상변경 등 허가 관련 회의 결과

→ 남산골 관람환경개선 사업 설계(안)중 석재난간 설치는 평석이기 때문에     전통문화재에는 하지 않고 있음(미설치 요망)

Ⅲ		계약발주 방법

□  남산골 한옥마을 관람환경개선사업(공사)

□ 공사기간 : 착공일로부터 90일

□ 발주방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

□ 참가자격 : 건설산업기본법에 의한 조경시설물설치공사업 면허를 보유한             업체로서 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

□ 소요예산 : 291,126,020원(관급비 158,076,020원 포함)

□   남산골 한옥마을 관람환경개선사업(폐기물 처리용역)

□ 용역기간 : 착수일로부터 90일

□ 발주방법 : 수의계약

□ 계약방법 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제            30조 제1항제2호에 의거 추정가격(5천만원 이하)여성기업            업체와 수의계약

□ 소요예산 : 53,501,000원

Ⅳ		추진 일정

□  2019. 4~5 : 공사발주 및 계약

□  2019. 6~8 : 공사 시행 및 준공예정

Ⅴ		사업 효과

□  전통정원을 이용자에게 쾌적한 환경과 휴식공간 제공