◈교통처리계획 요약(변경)

공사지점	단계별	구 간	공사기간	공사시간	내용	변경사항
남부순환로	1	남부순환로 (서부트럭터미널 지하차도 시종점~ 오류IC)	(당초) 2017.09.01 ~ 2018.03.31 (변경) 2019.05.04 ~ 2019.08.31	주간공사 (24시간 점용)	-주간 공사(24시간 점용) -사당/김포방향 측도 1차로 공사(1~2차로→1차로) -1차선 통제후 우회처리(※배수관 부설공사) -STA.+0000~0+220(우)노상성토작업진행 -오류I/C 공사중 우회도로 개설 -마을버스 2번노선 우회처리 -남부순환로 버스정류장 2단계로 공사 -공사중 최소 차로폭(B=3.0m) 및 보행통로폭(B=2.0m)이상확보	- 공사기간 변경 - 도면 변경사항 없음
	2		(당초) 2017.12.31 ~ 2018.03.31 (변경) 2019.09.01 ~ 2019.12.31		-주간 공사(24시간 점용) -사당/김포방향 측도 1차로 공사(1~2차로→1차로) -1차선 통제후 우회처리(※배수관 부설공사) -개봉1동사거리~오류IC교 구간은 공사중단 구간으로 추후 공사재개시 교통규제심의 변경요청 예정임 -오류IC공사중 우회도로 개설 -마을버스 2번노선 우회처리 -남부순환로 버스정류장 2단계로 공사 -지하보차도 공사시 심야 30분간 교통통제 -개봉1동사거리 좌회전 허용 -공사중 최소 차로폭(B=3.0m) 및 보행통로폭(B=2.0m)이상확보	- 공사기간 변경 - 도면 변경사항 없음
	3		(당초) 2018.03.31 ~ 2018.06.30 (변경) 2020.01.01 ~ 2020.04.30		-주간 공사(24시간 점용)(지하보차도 철거공사: 심야) -마을버스 2번노선 우회처리 -오류IC공사중 우회도로 개설 -지하보차도 공사시 심야 30분간 교통통제 -지하보차도 교차로 임시신호등 설치 -개봉1동사거리 좌회전 허용 -공사중 최소 차로폭(B=3.0m) 및 보행통로폭(B=2.0m)이상확보	- 공사기간 변경 - 도면 변경사항 없음

공사지점	단계별	구 간	공사기간	공사시간	내용	변경사항
남부순환로	4	남부순환로 (서부트럭터미널 지하차도 시종점~ 오류IC)	(당초) 2018.06.30 ~ 2018.09.30 (변경) 2020.05.01 ~ 2020.07.31	주간공사 (24시간 점용)	-주간 공사(24시간 점용)(오류I/C 상판 철거공사,지하보차도 철거공사: 심야) -마을버스 2번노선 우회처리 -오류IC공사중 우회도로 개설 -오류I/C 상판철거공사시 경인로 30분간(2일) 교통통제 -지하보차도 공사시 심야 30분간 교통통제 -지하보차도 교차로 임시신호등 설치 -개봉1동사거리 좌회전 허용 -공사중 최소 차로폭(B=3.0m) 및 보행통로폭(B=2.0m)이상확보	- 공사기간 변경 - 도면 변경사항 없음
	5		(당초) 2018.09.30 ~ 2018.12.31 (변경) 2020.08.01 ~ 2020.09.30		-주간 공사(24시간 점용)(지하보차도 철거공사: 심야) -측도 일부구간 양방통행→일방통행으로 변경 -마을버스 2번노선 우회처리 -오류I/C 공사완료 -지하보차도 공사시 심야 30분간 교통통제 -지하보차도 교차로 임시신호등 설치 -개봉1동사거리 좌회전 허용 -공사중 최소 차로폭(B=3.0m) 및 보행통로폭(B=2.0m)이상확보	- 공사기간 변경 - 도면 변경사항 없음
	6		(당초) 2018.12.31 ~ 2019.01.31 (변경) 2020.10.01 ~ 2020.11.30		-주간 공사(24시간 점용) -측도 일부구간 양방통행→일방통행으로 변경 -마을버스 2번노선 우회처리 -오류I/C 공사완료 -8~10단계는 단계별 시공 -횡단보도 신호등 설치 -개봉1동사거리 좌회전 허용 -공사중 최소 차로폭(B=3.0m) 및 보행통로폭(B=2.0m)이상확보	- 공사기간 변경 - 도면 변경사항 없음

공사지점	단계별	구 간	공사기간	공사시간	내용	변경사항
남부순환로	7	남부순환로 (서부트럭터미널 지하차도 시종점~ 오류IC)	(당초) 2019.02 ~ 2019.03 (변경) 2020.11.01 ~ 2020.12.31	주간공사 (24시간 점용)	-주간 공사(24시간 점용) -전구간 차량통행체계 복원후 공사 -녹지대 및 보도설치(2단계) 구간 공사 -기타 부대시설 공사	- 공사기간 변경 - 도면 변경사항 없음
						-
						-