투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건축부장
(경유)
제 목	설비분야 건설사업관리기술자 배치기간 연장 요청(시민생활사박물관리모델링 증축 공사)

우리 부에서 시행중인『시민생활사박물관리모델링 증축 공사』는 리모델링공사와 환경개선공사가 병합된 사업으로 설비분야 도급 및 관급의 공사기한이 2019.06.20.일 임을 감안하여, 사업의 원할한 진행과 준공 및 인수인계를 위하여 설비분야 건설사업관리기술자(상주기술자 및 기술지원기술자)의 배치기간을 아래와 같이 연장 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건설사업관리기술자(상주기술자 및 기술지원기술자) 배치 기간 현황

분 야		변경전	변경후	비고
상주기술자	보조기술자(기계)	2019.04.20	2019.06.20	증 51일
	보조기술자(전기)
	보조기술자(통신)
기술지원기술자	기계
	전기
	통신
	소방

※ 선행 공정이 단축시 건설사업관리기술자 배치기간은 조정 가능.

나. 연장사유 : 선행공정과 사업기간을 일치하기 위함.

다. 공정율 : 기계 95%, 전기 92%, 통신 98%

붙임 :  1. 용역변경계약서(총차,2회) 1부.

2. 건설사업관리기술자 배치계획표(2차 2회 변경) 1부.

	설비부장
주무관	이강욱		건축설비과장	代이강욱		설비부장	04/19 임정규
협조자	주무관	백남진
시행	설비부-5721	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시중구 청계천로8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 15층 108-1	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	24326@seoul.go.kr	/	부분공개(5)