문서번호	방재시설부-5639
결재일자	2019.4.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
권지현		오춘섭	04/22 이임섭
협 조

「올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 공사」

3~4단계 지장수목 처리 실정사항 검토보고

2019. 4

도시기반시설본부

(방재시설부)

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』

3~4단계 지장수목 처리 실정사항 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□=====================□□==========-==□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』3~4단계 공사구간 내 지장수목의 이식 및 제거와 관련하여 아래와 같이 설계에 반영하고자 실정보고 합니다. [관련공문 : 올대감 19-107(2019.4.18)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 서울시 송파구 풍납동 일원(올림픽대교 남단)

○ 규    모 : 램프신설 : L=1,383m, 램프이설 : L=1,309m

- 조경공사 : 지장수목(교목 723주, 관목 66,510주), 조경시설 1식

○ 기    간 : 2016.04.01 ~ 2020.03.05

○ 도 급 비 : 329억원(조경 962백만원)

Ⅱ		실정보고

○ 추진경위

- ’18.11.16 : 2단계 지장수목 추가분 협의결과 통보

- ‘18.11.27 : 2단계 추가지장 수목 실정보고 승인

- ’19.02.20 : 3~4단계 지장수목 관계기관(서울시설공단) 현장합동조사

- ‘19.03.05 : 지장수목 관계기관(송파구청) 현장합동조사

- ‘19.03.20 : 지장수목 협의결과(송파구청) 통보

- ‘19.04.02 : 지장수목 협의결과(한강사업본부)통보

○ 보고내용

- 3~4단계 공사구간 내 추가 지장수목에 대한 관계기관 협의결과에 따른수목 처리방안(이식 및 제거) 및 공사비 증·감 보고

○ 단계별 처리내용 및 3~4 단계 추가수량

구 분		단위	당초(계약)	변경	증, 감	비 고
계	교목	주	723	844	121	16.06~19.06
	관목	주	66,510	66,712	202
1단계	교목	주	333	333	-	16.06~17.04 (완료)
	관목	주	26,771	26,771	-
2단계	교목	주	171	171	-	17.08~18.11 (완료)
	관목	주	23,510	23,510	-
3단계	교목	주	77	119	42	19.03~19.06 (금회)
	관목	주	12,593	12,750	157
4단계	교목	주	142	221	79
	관목	주	3,636	3,681	45

○ 관계기관 지장수목 처리방안 협의결과

구 분		단위	지장수목		협의결과	관계기관	비고
계	교목	주	340		폐기(190) + 이식(150)
	관목	주	16,431		폐기(12,760) + 이식(3,671) + 신규(12,750)
3단계	교목	주	119		폐기(119)	시설공단
	관목	주	12,750	7,750	폐기(7,750) → 신규식재대체(7,750)	시설공단
				5,000	폐기(5,000) → 신규식재대체(5,000)	한강사업본부
4단계	교목	주	221		폐기(71) + 이식(150)	송파구
	관목	주	3,681		폐기(10) + 이식(3,671)	송파구

ㅇ 공사비 증⦁감 검토

- 관련규정 : 공사관리일반조건 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 단가적용 : 1) 물량증가 → 기계약단가 적용

2) 신규비목 → 협의율적용 (85.98%)

- 주요공사비 증.감 원인분석 (증 : 342백만원)

1) 임목폐기 : 증  11백만원(임목폐기물 : 증 155ton)

2) 수목제거 : 증  74백만원 (관목 : 감 3,469주, 교목 : 감 29주)

3) 관목식재 : 증  95백만원 (관목 : 증 12,750주)

4) 수목이식 : 증 162백만원 (관목 : 증 3,671주, 교목 : 증 150주)

공 종	규 격	단위	수 량			금 액(천원)			비고
			당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
9.01. 토공
파쇄물처리운반	덤프24ton	㎥	38	158	120	336	1,398	1,062
9.05. 식재공(제거)
교목류	R10~R70	주	219	190	-29	17,893	68,341	50,448
관목류	H0.3-2.0	주	16,229	12,760	-3,469	4,899	7,488	2,589
9.06. 식재공
관목식재-청담도로공원	자산홍H0.4*W0.4	주	-	2,000	2,000	-	9,536	9,536
관목식재-암사대교남단	백철쭉H0.4*W0.4	주	-	5,750	5,750	-	28,739	28,739
관목식재(한강둔치)	개나리	주	-	5,000	5,000	-	29,910	29,910
9.07. 이식식재공
교목류(송파구관내)	R8~R35	주	-	150	150	-	46,099	46,099
관목류(송파구관내)	H1.6~2.5	주	-	3,671	3,671	-	69,255	69,255
직 접 비						23,128	260,766	237,638
임목폐기물처리		ton	50	205	155	2,364	9,694	7,330
간 접 비						10,228	107,070	96,842
도 급 비						35,720	377,530	341,810

Ⅲ		검토보고

○ 당초설계에 반영되어 있지 않은 대형목의 이식 및 제거물량 포함이 도급비 증액의 주요요인이 됨.

○ 설계변경 중 신규비목은 도시기반시설본부 조경공사 설계대가기준(2019)으로 산출하여 강제협의율[85.98%〕적용하였음.

Ⅳ		보고자 의견

○ 관계기관의 협의에 따른 적정한 변경으로 판단되어, 책임사업관리자가 제출한 실정보고를 승인조치하고, 변경에 따른 공사비 증․감 부분은 추후 설계변경시 반영하고자 합니다.

붙 임 : 책임사업관리자 기술검토 의견서 1부(별첨).  끝.