문서번호	설비부-5875
결재일자	2019.4.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이강욱	김은덕	04/23 임정규

『돈화문민요박물관건립 기계공사(1차)』

도급 및 관급 공사기간 변경 검토보고

2019.04.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『돈화문민요박물관건립 기계공사(1차)』

도급 및 관급 공사기간 변경 검토보고

「돈화문민요박물관건립 기계공사」와 관련 도급 및 관급자재에 대하여 건설사업기술단으로부터 공사기간 변경 보고서가 제출되어 검토 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ ㈜혜원까치종합건축사사무소 혜원돈화 제2019-123호(2019.04.23.)

「공가시간 연장 요청 검토결과 제출(돈화문민요박물관건립 기계공사(총차 및 1차)」

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 돈화문민요박물관건립 기계공사(1차)

□ 공사위치 : 서울시 종로구 와룡동 5-9외 2필지

□ 공사규모 : 지하2층/지상1층(연면적 1,384.82㎡),문화 및 집회시설

□ 공사기간 : ‘18.01.10.~’19.07.09(1차 ‘18.01.10~’19.04.30)

□ 공 사 비 : 739백만원(도급 508, 관급 222, 분담금 9)

Ⅲ		검토내용

□ 공사기간 변경사유

- 선행공정(건축) 공사기간 연장으로 후속공정인 기계공사의 공사기한을 연장하여 원할한 사업을 추진하기 위함

※ 건축 공사기한 : 2019.8.31.(1차 2019.05.31.)

□ 변경내용

- 도급                                                      (단위 : 원)

구 분		변경전	변경후	비고
공사기간	총차	‘18.01.10.~’19.07.09	‘18.01.10.~’19.08.31	증 53일
	1차	‘18.01.10~’19.04.30	‘18.01.10.~’19.06.30	증 61일
공사비	총차	508,373,760	508,373,760	변동없음
	1차	187,251,000	187,251,000	변동없음

- 관급                                                      (단위 : 원)

공종별	품대계	납품기한		납품요구번호 (계약번호)	비고
		변경전	변경후
공기조화기	90,613,000	2019.06.05	2019.08.31	12-19-2-15750-00	3자단가
물탱크	14,719,000	2019.07.09	2019.08.31	12-18-2-04919-00	3자단가
전기히터	1,112,000	2019.07.09	2019.08.31	12-18-2-04908-00	3자단가
부스터펌프	7,260,000	2019.07.09	2019.08.31	12-18-2-04907-00	3자단가
항온항습기	31,295,000	2019.07.09	2019.08.31	12-18-2-04902-00	3자단가
냉난방기	1,568,000	2019.07.09	2019.08.31	12-18-2-04900-00	3자단가
	23,454,620	2019.07.09	2019.08.31	12-18-2-04899-00	3자단가
엘리베이터	51,620,000	2019.07.09	2019.08.31	12182036401	총액계약

□ 감리단 검토의견

- 선행공종인 건축공사의 준공기한 연기로 기계공사의 도급공사 및 관급자재 설치의 절대공기 부족으로 공기연장함이 적정 함.

Ⅳ		조치의견

□ 건설사업단의 공사기간 연장 검토보고가 적정하여 현장여건에 맞게 공사기간을 연장하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 검토 보고서(도급 및 관급 합의각서 포함) 1부.   끝.