문서번호	도시철도사업부-3982
결재일자	2019.4.24.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		경전철과장	도시철도사업부장
윤대희		권영민	전결 04/24 최병훈
협조	공사지원과장		김충범
	주무관		조규영

신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)

건축분야 감리원 투입계획 변경에 따른 계약변경 검토보고

(총괄 6회, 3차 2회)

2019. 4.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)

건축분야 감리원 투입계획 변경에 따른 계약변경 검토보고

(총괄 6회, 3차 2회)

신림선 도시철도 전면책임감리용역(2공구)의 건축분야 보조감리원 투입계획 변경에 따른 계약변경 요청에 대한 검토 보고임

※ ㈜ 유신 감리 19-245(2019. 4.23)호

1		용역개요

□ 용 역 명 : 서울시 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)

□ 용역업체 : ㈜유신 외 2개사

□ 계약현황

(단위 : 천원)

구 분		계 약 일	계 약 기 간	계 약 금 액
총 괄		2011.10.24	2011.11. 1 ~ 2022. 3. 7	3,118,073
기준공	1차	2011.10.24	2011.11. 1 ~ 2017. 7.28	335,379
	2차	2017. 9. 6	2017. 7.29 ~ 2018. 4. 3	334,680
진 행	3차	2018. 4.23	2018. 4. 4 ~ 2019. 5.31	691,000
잔 여			2019. 6. 1 ~ 2022. 3. 7	1,757,014

2		검토내용

□ 건축분야 보조감리원 투입계획 변경에 따른 투입기간 조정

○ 투입기간 조정 근거

- 신림선 경전철 2공구 건축분야 상주감리원 투입 알림 : 도시철도건축부-2477(’19.4.3)호

· 당초투입일 : ´19. 3. 15 ⇒  변경 투입일 : ´19. 4. 1

○ 계약기간 조정

- 건축분야 보조감리원 투입계획 변경에 따른 계약기간(3차) 변경 조정

구 분	당 초	변 경	비 고
총 괄 (5회)	’11.11. 1 ~ ’22. 3. 7	’11.11. 1 ~ ’22. 3. 7 (변경없음)
3 차 (2회)	’18. 4. 4 ~ ’19. 5.31	’18. 4. 4 ~ ’19. 6. 4	증) 4일

○ 계약금액 조정 : 변경없음

○ 감리원 투입계획 변경 현황

구 분		총 괄			3 차
		당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
계		277.7 인·월	277.7 인·월	-	59.89 인․월	59.89 인․월	-
토 목	수석 감리사	´16. 9. 8 ~ ´22. 3. 7 (83.88인·월)	´16. 9. 8 ~ ´22. 3. 7 (83.88인·월)	-	´18. 4. 4 ~ ´19. 5.31 (17.75인·월)	´18. 4. 4 ~ ´19. 6. 4 (17.84인·월)	증) 0.09인․월
	감리사	´16. 9. 8 ~ ´22. 3. 7 (66.0인·월)	´16. 9. 8 ~ ´22. 3. 7 (66.0인·월)	-	´18. 4. 4 ~ ´19. 5.31 (13.97인·월)	´18. 4. 4 ~ ´19. 6. 4 (14.04인·월)	증) 0.07인․월
	감리사	´18. 9.13 ~ ´21.10.12 (37.0인·월)	´18. 9.13 ~ ´21.10.12 (37.0인·월)	-	´18. 9.13 ~ ´19. 5.31 (8.6인·월)	´18. 9.13 ~ ´19. 6. 4 (8.74인·월)	증) 0.14인․월
	감리 사보	´17. 7. 3 ~ ´20.10. 6 (31.55인·월)	´17. 7. 3 ~ ´20.10. 6 (31.55인·월)	-	´18. 4. 4 ~ ´19. 5.31 (11.09인·월)	´18. 4. 4 ~ ´19. 6. 4 (11.15인·월)	증) 0.06인․월
건 축	감리사	´19. 3.15 ~ ´21.10.31 (31.50인·월)	´19. 4. 1 ~ ´21.11.15 (31.50인·월)	-	´18. 3.15 ~ ´19. 5.31 (2.5인·월)	´18. 4. 1 ~ ´19. 6. 4 (2.14인·월)	감) 0.36인․월
기술지원 감리원	수석감리사	´16. 9. 8 ~ ´22. 3. 7 (27.77인·월)	´16. 9. 8 ~ ´22. 3. 7 (27.77인·월)	-	´18. 4. 4 ~ ´19. 5.31 (5.98인·월)	´18. 4. 4 ~ ´19. 6 . 4 (5.98인·월)	-

3		조치계획

○ 상기 검토내용과 같이 건축분야 감리원 투입계획 변경에 따라 ‘총괄’ 및 ‘3차 용역계약’ 을 아래와 같이 계약 변경 하고자 함

- 변경 내용

구 분	당 초		변 경		비 고
	계약기간	계약금액 (천원)	계약기간	계약금액 (천원)
총 괄 (6회)	’11.11.29 ~ ’22. 3. 7	3,118,073	’11.11.29 ~ ’22. 3. 7 (변경없음)	3,118,073 (변경없음)	□계약기간 및 계약금액 변경은 없으나, 건축 감리원 투입계획 변경에 따른 감리원 투입계획 조정
3 차 (2회)	’18. 4. 4 ~ ’19. 5.31	691,000	’18. 4. 4 ~ ’19. 6. 4	691,000 (변경없음)	□계약기간 : 증) 4일 □사유 - 건축 감리원 투입계획 변경에 따른 감리원 투입계획 및 계약기간 조정

붙  임  1. 감리단 공문(관련서류) 1부.

2. 변경 설계내역서(총차, 3차) 1부.  끝.